문서번호	서울특별시차량정비센터-11671
결재일자	2015.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	차량정비센터소장
김응균		이광천	08/06 문호준
협조	서무팀장		유진국
	주무관		김명국

공사 설계변경 보고

공사명 : 조립식 정비동(4개동) 전력간선 케이블 증설공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  08.

차량정비센터

공사 설계변경 보고

공사명 : 조립식 정비동(4개동) 전력간선 케이블 증설공사

우리센터 조립식 정비동(4개동) 전력간선 케이블 증설공사 감독업무 수행중 설계변경 사항이 발생하였기, 변경시행하여 공사를 완료코자 합니다.

공사현황

❍ 공 사 명 : 조립식 정비동(4개동) 전력간선 케이블 증설공사

❍ 공사기간 : 2015. 07. 09 ∼ 2015. 08. 12

❍ 계약업체 : 주식회사 서광전기 대표 안창주

❍ 계약금액 : 금57,183,960원(금오천칠백일십팔만삼천구백육십원)

설계변경 내용

(단위 : 원, 순공사비 기준)

공 종	규 격	당 초	변 경	증,감	변경 사유
계		39,188,278	39,810,565	증622,287
전선관 (지중)	PE 28C	69,320	55,456	감13,864	- 물량감소(실측) ・10m → 8m
전선관 (지중)	PE 54C	166,760	133,408	감33,352	- 물량감소(실측) ・10m → 8m
전선관 (지중)	PE 54C	329,470	0	감329,470	- 물량감소, 자재변경 ・ 10m → 0m
전선관 (노출)	HI 28C	988,974	643,618	감345,356	- 물량감소(실측) ・63m → 41m
전선관 (노출)	HI 42C	692,091	640,825	감51,266	- 물량감소(실측) ・27m → 25m
전선관 (노출)	HI 54C	4,337,820	3,702,105	감635,715	- 물량감소(실측) ・116m → 99m
전선관 (노출)	HI 70C	1,582,153	1,200,254	감381,899	- 물량감소(실측) ・29m → 22m
전선관 (노출)	HI 82C	11,292,990	8,670,102	감2,622,888	- 물량감소(실측) ・155m → 119m
전선관 노말 (노출)	HI 54C	13,235	10,588	감2,647	- 물량감소(실측) ・5개 → 4개
전선관 노말 (노출)	HI 70C	17,649	11,766	감5,883	- 물량감소(실측) ・3개 → 2개
전선관 노말 (노출)	HI 82C	16,180	8,090	감8,090	- 물량감소(실측) ・2개 → 1개

공 종	규 격	당 초	변 경	증,감	변경 사유
케이블 설치	F-CV 10㎟＊2C	383,732	303,416	감80,316	- 물량감소(실측) ・86m → 68m
케이블 설치	F-CV 16㎟＊1C	273,210	245,889	감27,321	- 물량감소(실측) ・30m → 27m
케이블 설치	F-CV 25㎟＊1C	564,000	446,500	감117,500	- 물량감소(실측) ・48m → 38m
케이블 설치	F-CV 35㎟＊1C	1,477,407	1,644,948	증167,541	- 물량증가(실측) ・97m → 108m
케이블 설치	F-CV 50㎟＊1C	624,736	449,029	감175,707	- 물량감소(실측) ・32m → 23m
케이블 설치	F-CV 120㎟＊1C	7,484,366	6,096,815	감1,387,551	- 물량감소(실측) ・178m → 145m
접지 케이블	F-GV 10㎟＊1C	210,528	166,464	감44,064	- 물량감소(실측) ・86m → 68m
접지 케이블	F-GV 25㎟＊1C	1,460,760	1,484,070	증23,310	- 물량증가(실측) ・376m → 382m
터미널 접속	25㎟	459,072	229,536	감229,536	- 물량감소(실측) ・24개 → 12개
터미널 접속	35㎟	115,926	347,778	증231,852	- 물량증가(실측) ・6개 → 18개
아스콘 절단	주간,기계	42,660	34,128	감8,532	- 물량감소(실측) ・20m → 16m
아스콘 포장깨기	소형브레이커	91,478	109,774	증18,296	- 물량증가(실측) ・1.6㎥ → 1.92㎥
소파 보수	아스팔트	146,479	175,774	증29,295	- 물량증가(실측) ・1.6㎥ → 1.92㎥
인력터파기	다짐,되메우기 포함	76,573	61,258	감15,315	- 물량감소(실측) ・3.25㎥ → 2.6㎥
폐기물처리	폐 전선관 등	121,777	146,131	증24,354	- 물량증가(실측) ・3.52톤 → 4.22톤
전선관 철거	HI 36C	332,040	376,312	증44,272	- 물량증가(실측) ・60m → 68m
케이블 철거	CV 22㎟＊1C	91,680	360,608	증268,928	- 물량증가(실측) ・60m → 236m
케이블 철거	CV 38㎟＊1C	295,124	336,574	증41,450	- 물량증가(실측) ・178m → 203m
전선관(지중)	HI 82C	0	324,512	증324,512	- 자재변경(강도 및 내식성 향상) ・0m → 8m
전선관 (노출)	ST 28C	0	26,719	증26,719	- 물량증가(실측) ・0m → 1m
전선관 (노출)	ST 36C	0	835,240	증835,240	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0m → 20m
전선관 (노출)	ST 54C	0	1,124,142	증1,124,142	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0m → 17m

공 종	규 격	당 초	변 경	증,감	변경 사유
플렉시블 전선관 (노출)	방수 36C	0	20,701	증20,701	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0m → 1m
플렉시블 전선관 (노출)	방수 54C	0	33,164	증33,164	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0m → 1m
전선관 노말 (노출)	ST 36C	0	6,882	증6,882	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0개 → 2개
전선관 노말 (노출)	ST 54C	0	6,801	증6,801	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0개 → 1개
플렉시블 연결부속	방수 36C	0	6,142	증6,142	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0개 → 2개
플렉시블 연결부속	방수 54C	0	9,932	증9,932	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0개 → 2개
케이블 설치	F-CV 16㎟＊1C	0	365,888	증365,888	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0m → 64m
풀박스 설치	ST 200*200*200	0	81,783	증81,783	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0개 → 1개
풀박스 설치	STS 100*100*100	0	41,215	증41,215	- 누락물량 추가 ・0개 → 1개
풀박스 설치	STS 150*150*150	0	98,507	증98,507	- 누락물량 추가 ・0개 → 1개
휀스 설치	메시 1200*2000	0	574,398	증574,398	- 누락물량 추가 ・0개 → 1개
접지 케이블	F-GV 16㎟＊1	0	283,974	증283,974	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0m → 94m
터미널 접속	16㎟	0	312,260	증312,260	- 차량정비센터-11033호에 따른 기관반(측면건물) 추가물량 발생 ・0개 → 20개
철거 (전선관)	ST 42C	0	2,424,708	증2,424,708	- 누락 물량 추가 ・0m → 143m
철거 (케이블)	CV 14㎟＊1C	0	51,030	증51,030	- 누락물량 추가 ・0m → 42m
고재처리	경량A	0	-67,824	증-67,824	- 누락물량 추가 ・0kg → 398kg
고재처리	동,하품	-377,800	-648,713	증-270,913	- 누락물량 추가 ・299kg →514kg

설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당초설계	변경설계	증감액	비고
총사업비		57,183,960	58,421,000	증1,237,040
도급비	공급가액	51,985,419	53,110,001	증1,124,582
	부가가치세	5,198,541	5,310,999	증112,458
	소 계	57,183,960	58,421,000	증1,237,040

보고자 의견

❍ 상기 설계변경 내용과 같이 설계변경을 시행하여 변경계약후 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 :  1) 변경 내역서 및 도면 각 1부

2) 준공기한 연기 보고서 1부.  끝.