문서번호	주차계획과-10636
결재일자	2015.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		김종상	08/06 윤보영
협조

창신동 주택가 공동주차장 건설 (종로구) 예산교부 검토

2015. 8.

도시교통본부

(주차계획과)

창신동 주택가 공동주차장 건설 예산교부 검토

종로구에서 추진중인『창신동 주택가 공동주차장 건설사업』관련 ‘15년 예산편성된 주차장 사업비(시비) 교부 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 서울특별시 종로구 창신길83(창신동 641 외 2)

○ 규    모 : 대지면적 2,071㎡ (연면적 8,307㎡)

- 공영주차장 : 지하4층~지상1층, 주차면수 245면

․공영주차장 → 일반승용차 165면, 이륜자동차 80면 (연면적: 6,807㎡)

- 청소년문화의집 및 도서관 : 지상2층~지상3층 (연면적: 1,500㎡)

○ 총사업비 : 21,331백만원

구분	계	사업비		재원구분
		토지매입	건설비	국비	시비	구비
계	21,331	7,000	14,331	1,758	9040.5	10,532.5
주차장	15,939	7,000	8,939		7,969.5	7,969.5
도서관	1,394		1,394	558	272	564
청소년문화의집	3,998		3,998	1,200	799	1,999

○ 사업기간 : ‘14.2 ~ ‘18.4.

Ⅱ. 추진현황 및 향후계획

○ 2013.01.16. : 창신동 신년 인사회 주민건의

○ 2014.02.03. : 서울시 투융자심사

○ 2014.07.14. : 중앙 투융자심사분석의뢰 결과 ⇒ 조건부 의견

- 국비 지원계획 확정후 가용재원 범위에서 주차장은 향후 수요를 감안하여 적정규모로 확대 ⇒ 213억원 (국비 17, 시비 90, 구비 106)

○ 2014.08. ~ 2014.12. : 도시계획시설 결정도서 작성 및 실시계획인가

○ 2015.  6. ~ 2016. 5.  : 보상시행

○ 2015. 10. ~  2016. 9.  : 기본 및 실시설계 용역

○ 2016.  6. ~  2016.  9.  : 문화재발굴조사 시행

○ 2016. 10. ~ 2018. 4.  : 건설공사 시행 및 완공

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 창신길83 공영주차장 건설 예산 교부

- 관련공문 : 2015년 주차장건설사업 시비보조금 배정요청

: 종로구 주차관리과-21154호 (2015.8.4)

□ 주차장 분야별 사업비 (단위: 백만원)

구 분		사업비	시 비	구 비	발주시기	비 고
계		15,939	7,969.5	7,969.5
보상비	보 상	7,000	3,500	3,500	‘15.8~
설계용역	설계용역	367	183	184	‘15.10
공사발주	토목,건축	7,250	3,625	3,625	‘16.10~
	전 기	224	112	112
	소방전기	374	187	187
	통 신	194	97	97
	기계	165	82.5	82.5
감리비	시공감리	576.9	346.1	230.8	‘16.10

□ 예산배정 검토(주차장건설)

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조, 단위: 백만원)

구 분	계	‘14년이전	‘15년			‘16년이후	비고
			계	기배정	금회배정
계	15,939		8,300	-	8,300	7,639
시 비	7,970		4,150	-	4,150	3,820
구 비	7,969		4,150	-	4,150	3,819

□ 요청 사유

○ 토지보상금 지급 등에 따른 시비배정 요청

□ 검토 의견

○ 동 사업은 현재 토지보상중이며 추진일정에 따라 사업은 정상적으로 추진중인 것으로 판단되며

○ 토지보상 집행에 필요한 ‘15년 편성된 시비 4,150백만원 요청하는 사항으로 사업이 원활하게 이루어질 수 있도록 예산배정함이 타당하다고 사료됨.

첨부   1) 예산교부 요청공문 1부

2) ‘15구비편성 및 토지현황 1부.   끝.