보고서(급수공사연기)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
박상권	代박상권	08/06 이계환
협 조

문서번호 :	시설관리과-12987

강북구 상수도공사 감독업무 수행중 ***************** 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015. 8. 06.

보고자 : ***********************

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	***************	***	2015.8.03.~8.06	신설-25

□ 연기요청사항

연번	주소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간
1	***************	***	수요가 연기요청 (자재적치)	2015.8.21

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 일정 재협의로 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	***************	***	2015.8.03.~8.06	2015.8.03.~2015.8.21

□ 귀책사유 : 북부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 1부(따로붙임).  끝.