문서번호	정수시설과-2823
결재일자	2015.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		윤종민	08/06 이성재
협 조

전기설비 보수공사(연간단가) 1차 설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08.

전기설비 보수공사(연간단가) 1차 설계변경 시행 보고

우리 정수센터 전기설비의 효율적인 유지보수를 위한 전기설비등 보수공사(연간단가) 시행 중 물량 증·감 및 추가사항이 발생 하였기에  아래와 같이 설계변경 시행하고자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 2015년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 사업기간 : 2015. 4. 09. ~ 2016. 03. 31

◯ 계약금액 : 금56,401,620원

◯ 계 약 자 : 경신전기 대표 김경택

◯ 정비공사 계약 내역

- 접지봉설치 16mm x 1800mm 1본외 1건

- 난연PVC 절연 접지용전선 100m 외 2건

- 가교폴리에틸렌 케이블 2.5sp 2c 외 11건

- 리그단자 1Hole 외 2건

- 제어케이블 2c외 5건

- 콘센트 외 3건

- 조명기구 및 전선관 및 전기수리 자재

□ 작업지시 현황

◯ 1차작업지시 내용 : 송수펌프실 전동구동 전원공급 3건(2015.5.19.)

○ 2차작업지시 내용 : 송수펌프실 제어선설치 3건(2015.7.3.)

○ 3차작업지시 내용 : 송수펌프실 접지설치 (2015.7.16.)

※ 세부 작업지시내용은 첨부 작업지시서 참조

Ⅱ		설계변경 사항

□ 주요 변경 내역

○ 원활한 시설물유지관리 및 수질관리를 위한 시설개선

- 송수펌프실 환기설비 개선 전원공급

- 송수관로 밸브실 전원공급 설치

- 배출수처리동 피뢰단자함 설치

- 후문 전기 공급

- 전기실 냉반기 전원공급

- 전기실 접지 공사

□ 총괄변경 내용

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

○ 세부 물량 및 금액변경사항 : 첨부 내역서 참조

○ 변경내역 – 계약금액 변경없음

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	51,274.200	51,274.200	-
부가가치세	5,127,420	5,127,420	-
도급금액	56,401,620	56,401,620	-

Ⅲ		조치계획

□ 상기 변경 내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최코자  하며, 심의결과에 따라 설계변경 시행하고자 함

□ 작업완료한 사항에 대해서는 정산 및 대가(기성집행)지급 하고자 함

□ 예상치 못한 전기고장으로 인한 신규 공종이 대폭 증가하여 이로 인한 작업 미시행 사항이 발생되어 설계변경하여 전기설비 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함

붙   임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 작업지시서(1차 ~ 3차) 1부.  끝.