함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고 검토결과 통보

1. 공사감독2처-11684(2015.08.05)호와 관련입니다

2. 위호와 관련 귀 공단에서 위탁감독중인 “신당동 368번지 외 5개소 배급수관 정비공사”에 대한 공사실정 보고서를 검토하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 공사준공에 차질이 없도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토의견

구 간	시설관리공단 실정 보고	사업소 검토의견
3구간	1) 3구간 보도부 환토 - 지하시설물 하부등에 동공이 발생치 않토록 환토코자 함 - 환토 및 사토 증가량 : 216㎥ 2) 공기밸브 설치 - 부설관로 최고부에 공기밸브 1개 추가 설치코자 함 2) 보도 횡단 빗물받이 교체 - 굴착부의 횡단 빗물받이를 교체코자 함 - 사용가능한 일부(50%) 그레이팅은 재사용	1) 3구간 보도부 환토 - 도로관리청의 지시사항에 따라 환토하여 시공 2) 공기밸브 설치 - 상수관내 공기 배출을 위하여 최고부에 공기밸브 1개 추가 설치 3) 보도 횡단 빗물받이 교체 - 공사시 파손된 그레이팅은 교체하고 재사용 가능한 부분은 재사용하여 시공

끝.

	중부수도사업소장
★주무관	이상현		주무관	代김용만		급수운영과장	전결 08/06 이승철
협조자
시행	급수운영과-17220	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2155	/전송	3146-2289	/	sanghyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개