문서번호	지리정보과-4896
결재일자	2015.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		지리정보과장	시설안전부장
장기덕		정윤홍	08/06 代김영삼
협조

「’15년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공정 보고회 개최 계획

2015. 8.

상수도사업본부

지리정보과

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공정 보고회 개최 계획

상수도 GIS DB 정확도 개선사업의 내실있는 사업추진을 위하여 8월  공정 보고회를 개최하고자 함.

□ 용역개요

❍ 사업현황(총 625㎞, 4,656백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 217㎞ (신설 44, 기존 173)	측량 및 편집 : 189㎞ (신설 22, 기존 167)	측량 및 편집 : 219㎞ (신설 44, 기존 175)
용역기간	’15. 4. 1. ～ ’16. 3. 31.	’15. 4. 1. ～ ’16. 3. 31.	’15. 4. 4. ～ ’16. 3. 31.
계약금액	1,420백만원	1,506백만원	1,730백만원
사 업 자	중앙항업㈜ 외 2 [㈜제일항업, ㈜해양정보기술]	공간정보기술㈜ 외 2 [삼아항업㈜, 네이버시스템㈜]	새한항업㈜ 외 2 [범아엔지니어링㈜, 한국에스지티㈜]
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

□ 공정보고회 개요

❍ 일    시 : 2015. 8. 13.(목) 16 : 00 ~

❍ 장    소 : 본부 4층 회의실

❍ 참석대상 : 11명

․ 본  부 : 시설안전부장, 지리정보과장, 업무담당자(3명)

․ 사업소 : GIS 업무 담당자(8명)

․ 용역사 : 동남, 서북, 서남 용역(사업책임자, 공정업무 담당자)

❍ 주요 내용

- 8월 추진실적 및 향후 추진계획 등 사업수행 관련사항 보고

- 용역수행에 따른 애로사항 및 작업시 유의사항

- 밀페공간 작업에 따른 현장 안전관리 주의사항 및 업무지시

- 아파트 단지 내 매설배관 GIS구축 사업 입력 현황 등

□ 추진실적

❍ 공정현황

(7월 31일 기준 : 단위 km)

구 분		대 상	전월누계	금 월	누 계	공정(%)	비 고
계		625	272	97	369	59.0
동 남	소 계	219	75	43	118	53.9
	신 설	44	23	5	28	63.6
	기 존	175	52	38	90	51.4
서 북	소 계	217	107	42	149	68.78
	신 설	44	23	4	27	61.4
	기 존	173	84	38	122	70.5
서 남	소 계	189	90	12	102	54.0
	신 설	22	7	2	9	40.9
	기 존	167	83	10	93	55.7

□ 진행순서

❍	16:00 ~ 16:10  과장님 인사 말씀

❍ 16:10 ~ 16:45  추진실적 및 현황사항 보고(사업별 각 10분)

❍ 16:45 ~ 17:00  질의응답 및 지시사항 전달

□ 향후계획

❍ 보고회에서 제시된 의견 검토하여 사업에 반영

❍ 9월 공정보고회 개최 : ‘15. 10월(예정).  끝.