문서번호	정보시스템담당관-9103
결재일자	2015.8.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정보자원관리팀장	정보시스템담당관
김선애		현창기	08/07 代김기항
협조
	주무관		김광중

- 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 -

월 간 업 무 보 고

(2015.7.1.~2015.7.31)

2015. 8.

정 보 기 획 관

(정보시스템담당관)

- 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 -

월간업무 보고

(2015.7.1. ~ 2015.7.31)

『2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수』사업‘15.7월 월간업무 보고입니다(계약번호 : 20150318153호).

Ⅰ		사업개요

사업기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31

계 약 자 : ㈜한국정보공학디엔에스

계약금액 : 금445,000,000원

과업개요

❍ 기 운영하고 있는 공통행정시스템(31종)에 대한 유지보수

❍ 공통행정정보시스템 기능개선 및 보완개발

❍ 공통행정시스템 보급․공동활용 지원 및 운영체계 개선

❍ 기반 소프트웨어(미들웨어, 검색엔진 등) 및 개발 플랫폼 유지보수

Ⅱ		월간업무 보고

추진실적

❍ 추진기간 : 2015. 7. 1. ~ 7. 31.

❍ 투입현황 : 총 57M/M중 27.71M/M(전월 : 20.75M/M)

❍ 유지보수 처리실적

구분	과업 요청(건수)			과업 완료(건수)			전체 처리비율(%)	금월 처리비율(%)
	총누계	전월	금월	총누계	전월	금월
사용지원 요청	720	124	98	720	124	98	100.0	100.0
장애 오류신고	2	1	1	2	1	1	100.0	100.0
유지보수 요청	110	31	22	110	31	22	100.0	100.0
기 타	43	9	16	43	9	16	100.0	100.0
계	875	165	137	875	165	137	100.0	100.0

❍ 진척도

연번	구분		추진기간	단계	진척율		차월 계획	비고
					계획	실적
1	통합 유지보수		‘15.03.01. ~ 12.31.	유지 관리	50%	50%	60%
2	서비스수준협약 체결		‘15.04.01. ~ 4.30.		100%	100%	-	완료
3	기능 개선	일정관리시스템	‘15.04.01. ~ 6.30.	개발	100%	100%	-	완료
			‘15.08.01. ~ 10.30.	분석/설계	-	-	-	추가 확대
		시민표창관리시스템	‘15.06.15. ~ 9.30.	분석	30%	26%	60%
		방문민원 온라인화	‘15.05.18. ~ 8.31.	분석	30%	30%	60%
		품질시험관리시스템	‘15.05.18. ~ 6.30.	검토	100%	100%	-	완료
		자율위생점검관리시스템	‘15.07.21. ~ 8.14.	개발	50%	50%	100%
4	시스템 정기점검		‘15.03.01. ~ 12.31.	유지 관리	50%	50%	60%

❍ 기능개선 및 기타 실적

※ 별첨 주요 추진실적 참조

차월 주요 추진계획

❍ 공통행정시스템(31종) 통합 유지보수

❍ 기반 S/W(10종) 정기점검

❍ 공통행정시스템 기능개선 추진

- 대상 : 시민표창관리, 방문민원 온라인화

❍ 서울시 온라인(전자)민원 이용활성화 추진

따로 붙임 : 1. 주요 추진실적 1부.

2. 월간업무 현황보고서 1부.

3. 유지보수대장 1부.

4. 공통행정시스템 이용현황 1부.

5. 인터넷 민원신청 및 통합발급시스템 이용현황 1부.

6. 기반 S/W 정기점검 보고서 1부.  끝.