문서번호	토목부-16575
결재일자	2015.8.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		代한병찬	전결 08/07 노우성
협조

설계변경(전체7회, 4차1회) 검토 보고

( 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 )

2015. 8.

설계변경(전체7회, 4차1회) 검토 보고

( 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 )

기 실정보고하여 승인한 도로복구비, 시험비, 가시설 추가설치, 토취장 위치 변경, 물가변동 등을 설계변경 시행하고자 검토 보고드림.

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 남부순환로~오정대로간(봉오대로 삼거리간) 도로개설공사

○ 위    치 : 강서구 방화대로 ~ 부천시 오정구 봉오대로 삼거리

○ 규    모 : 도로개설 40m(8차로), 연장 1.23km (부천시 270m)

○ 기    간 : 2010. 9.29. ~ 2015.12.30. (총차)

○ 사 업 비 : 82,700백만원

○ 시 공 사 : 보훈종합건설(주), 감리사  ㈜수성엔지니어링

○ 공 정 율 : 68%  현재 가족길교 교량 설치중

□ 주요 설계변경 사항 (실정보고 승인)

연번	실정보고	설계변경 사항	공문번호	비고
1	지장물조사구간 도로복구비 반영	① 가설도로 보조기층포설(0㎡ → 54㎥) ② 지장물조사구간 복구포장(0㎥ → 105㎥)	토목부-6869호 (15.4.6.)
2	수로암거공법 변경시공	① 현장타설 콘크리트 암거:156.6m→ 5.0m ② 조립식PC암거:0m→ 198m ③ 수로암거 날개벽:2개소(좌,우)→1개소(우)	토목부-8566호 (15.4.24.)
3	품질확보를 위한 시험비용반영	① 프루프시험 : 0개소→ 6개소	토목부-10505호 (15.5.21.)
4	안전시공을 위한 가시설 추가설치	① H-pile 천공: 599m→ 785m (H-pile 10.0m 10본 추가시공) ② 토류판설치: 867㎡→ 876㎡ ③ 스티프너설치:0개소→ 576개소 ④ 계측기설치:20개소→ 24개소 ⑤ 어스앙카공(1,704m→ 1,656m)외 기타 수량산출오류 수정	토목부-10911호 (15.5.28.)
6	물가변동으로 인한계약금액 조정	① 가변동(K1,K2) 변경 적용 및 물가변동(K3) 적용.	토목부-11808호 (15.6.9.)
5	울타리 및 식생기반재취부공 추가설치	① SeedSpray: 3,654㎡→ 2,682㎡ ② 얇은식생기반취부공: 1,646㎡ →2,443㎡ ③ 울타리(메쉬휀스)설치:722m → 1,934m	토목부-13694호 (15.7.3.)
7	토취장 위치변경	① 토취장 위치변경 서울디지털센터 → 김포한강신도시	토목부-14014호 (15.7.7.)

□ 공사금액 변경 현황 (전체7회, 4차1회)

구 분		공사금액 및 공사기간
		당 초	변 경	증 ․ 감
전체 7회	도급비	10,864,000,000원	11,392,000,000원	(증)528,000,000원
	관급비	3,147,670,000원	3,097,850,000원	(감) 49,820,000원
	총공사비	14,011,670,000원	14,489,850,000원	(증)478,180,000원
	공사기간	‘10.09.29 ~ ’15.12.30 (1,919일)	‘10.09.29 ~ ’15.12.30 (1,919일)	변경없음
4차 1회	도급비	5,502,061,010원	6,030,061,010원	(증)528,000,000원
	관급비	2,289,823,190원	2,236,890,000원	(감) 52,933,190원
	총공사비	7,791,884,200원	8,266,951,010원	(증)475,066,810원
	공사기간	‘15.03.04 ~’15.12.30 (304일)	‘15.03.04 ~’15.12.30 (304일)	변경없음

□ 조치계획

○ 상기와 같이 설계변경(전체7회, 4차1회)을 검토한 책임건설사업관리기술자의 의견이 타당함으로 변경계약을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

붙  임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 (전체7회) 1부.

3. 설계변경 내역서 (4차1회) 1부.  끝.