문서번호	토목부-16470
결재일자	2015.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		代한병찬	08/07 노우성
협조

무인 영상 단속기 설치 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

도시기반시설본부

(토 목 부)

무인 영상 단속기 설치 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

서울지방경찰청으로부터 규제심의된 바와 같이 무인 영상 단속카메라를 정수장사거리~훈련원사거리구간 위험지역에 설치 완료하고 검토 보고드림.

※관련공문 : 서울지방경찰청 교통관리과-32335(2014.11.20.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교연결도로건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012.8 ~ 2015.12

○ 도 급 비 : 18,242백만원

○ 시 공 사 : (주)신성건설 외2개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1개사

□ 현   황

○ 무인영상단속카메라 2EA

제어장치 및 제어함체 2EA

□ 검토내용

○ 수량검토

내 용	수 량				비 고
	당 초	변 경	증 감
카메라(다기능)	-	2EA	증	2EA
지역제어장치	-	2EA	증	2EA
제어부(제어함체)	-	2EA	증	2EA
제어선포설	-	1식	증	1식
루프코일(다기능)	-	1식	증	1식
기초구조물	-	2EA	증	2EA
표지판	-	4EA	증	4EA
영상분석처리	-	1식	증	1식
종합시험	-	1식	증	1식

○ 공사비 검토

(금액단위 : 천원)

공 종	당 초	설계가 (100%)	협의율 (90.202%)	낙찰율 (80.405%)	비고
도 급 액	-	164,560	148,390	132,220

□ 감리단 검토의견

○ 2구간(정수장사거리~훈련원사거리) 무인영상단속카메라 설치는 도로교통공단의 현장보고서의 내용을 서울지방경찰청에서 검토승인된 건으로 공사물량은 적정한 것으로 판단되며

○ 설계변경심의결과에 따라 확정되는 공사비를 설계변경시 반영 하고자 함

□ 공사시행 협의(설계비)

○ 우리시 : 신규 공종에 대하여 낙찰율 80.405% 적용

○ 도급자 : 신규 공종에 대하여 100% 반영 요청

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경심의결과(설비부)에 따라 정산 처리함이 타당하다고 사료됨

○ 금회 실정보고의 신규 공종에 대하여 공사 시행 협의 하였으나 협의가 되지 않아 부득이 신규 공종인 무인 영상 단속기 설치에 대하여 공사계약일반조건 제20조2항에 따라 강제협의율(90.202%)을 적용코자 함.

- 개략공사비 : 증)148백만원

붙임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부.

2. 공사시행협의 회신문 1부.

3. 관련문서사본 1부.  끝.