투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	SH공사사장(택지조성팀장)
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사기한연장 승인(세곡2보금자리주택지구-안전표지)

1. 서울특별시 SH공사 택지조성팀-5303호(2015.8.07.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에서 시행하는「세곡2보금자리주택지구 교통안전시설(안전표지) 원인자부담공사」의 공사(준공)기한 연장승인요청에 대하여 아래와 같이 연장승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 세곡2보금자리주택지구 교통안전시설(안전표지) 원인자부담공사

나. 공사장소 : 강남구 세곡동 세곡2보금자리주택지구

다. 공사내용 : 교통안전표지 신설 및 철거

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 당 초 : 승인일 ~ 2015. 6. 30.

- 변 경 : 승인일 ~ 2015. 12. 03.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김동현		기전과장	08/07 남궁영주
협조자
시행	기전과-7668	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개