문서번호	정수시설과-2833
결재일자	2015.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정인영		윤종민	08/07 代홍맹식
협조	주무관		代서광호
	주무관		곽희영

와우산계통 수충격완화장치 가동중단 조치계획 보고

2015. 8.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

와우산계통 수충격완화장치

가동중단 조치계획 보고

와우산 계통(기존 설치분) 수충격 방지장치의 시설보완에 따른 가동중단 및 재기동과 관련하여, 가동중단 기간을 최소화 하여 와우산 계통운전의 위험성을 줄이는데 만전을 기하고자 함.

1		사업현황

○ 사 업 명 : 송수관로 수충격방지장치 신규설치 및 기존시설 보완

○ 사업개요

- 대현산계통 수충격완화장치 15㎥ × 2기 신규 설치

- 와우산계통 수충격완화장치 26㎥ × 2기 시설보완

○ 사업기간 : 2015. 5. 1 ~ 2015. 8. 29

○ 도 급 비 : 금433,000,000원

○ 도 급 자 : 플로우테크(주)  양재구

2		당초 작업계획 및 문제점

□ 당초 작업계획

○ 관련문서

- FT-2015-052호(2015.6.24) : 수충격방지장치 작업계획서 제출의 건

- 정수시설과-2244호(2015.6.25.) : 작업계획서 제출건접수 및 조치                                 계획 보고

○ 주요내용

- 8월 10일부터 8월 17일까지(7일간) 와우산 계통 셧-다운

- 셧-다운 기간중, 자동제어반 교체, 계기교체, 배수 및 충수 등 작업 실시 예정

□ 문제점

○ 가동중단 기간중 돌발정전으로 인한 수충격사고 발생 우려

3		조 치 계 획

□ 셧-다운 및 재기동 계획 변경

○ 셧-다운 기간 최소화 : 8월 18일 09:00 ~ 8월 18일 18:00 까지

○ 8월 14일 이전에 메인전원 공사 완료(1차전원 공급)

- 우리센터와 계약시행중인 전기설비 보수공사(연간단가)에서 조치

○ 8월 18일 09:00부터 와우산 계통 차단, 계기 분리 및 교체 작업

○ LCP-와우산계통 계기간 전원연결 공사를 먼저 실시한 뒤, 해당일에

교체만 빠르게 진행하여 셧-다운 일정을 최소화

○ 보온공사와 전기공사를 함께 진행하기 위해, 와우산과 대현산간의 각 공사를 교차로 진행

□ 공정표 변경

8월	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
배관공사 2차분(연결)
샌드위치 판넬 시공
계장철거 와우산계통
보온철거 와우산계통
정온전선 설치공사
보온설치공사 (비계설치포함)
전기공사
시운전
운전자교육

4		행정사항

□ 본 조치계획을 계약자에게 통보 조치

□ 와우산 계통 수충격 완화장치 가동중단 기간중 정수시설과 사무실 및 수리반 직원 비상근무.   끝.