문서번호	토목부-16596
결재일자	2015.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	08/10 노우성
협조
	주무관		장종환

화물터미널 앞 지하차도 구간 버스정류소 이설 검토 보고

화물터미널 앞 지하차도 구간 버스정류소 이설 검토 보고

【강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.8

도시기반시설본부

(토 목 부)

화물터미널 앞 지하차도 구간 버스정류소 이설 검토 보고

【강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사】

화물터미널 앞 지하차도 공사 구간 도로확장에 저촉되는 버스정류소 이설에 대해 관련부서와 협의하고 이설 시행하고자 보고드림

1		관련근거

❍ 버스정책과-5911호(`15.4.7.) 버스정류소 이설협의 회신

❍ 동기강 2015-393호(`15.7.16.) 버스정류소 이설 승인 요청

2		공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사구간 : 서초구 우면동 ~ 과천시 주암동 ~ 강남구 수서동

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96㎞(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공사기간 : 2001. 7. 3.~2018. 7.31.(9차 `15. 3.10.~12.31.)

❍ 도 급 비 : 222,995백만원(9차 : 25,000백만원)

❍ 시공사/감리사 : 롯데건설㈜ 외1 / ㈜동명기술공단

3		보고내용

❍ 양재대로 과천방향 버스정류소(양재동화물터미널)는 화물터미널 앞 지하차도 구간 도로확장에 저촉되어 이설이 불가피한 실정임

❍ 관련부서(버스정책과)와 협의결과 이전 및 원상복구는 원인자부담으로 시행하도록 회신

❍ 이설 위치도

변경 SET BACK 라인

기존 SET BACK 라인

LG R&D센터

AUTO갤러리

양곡도매시장

수 서

과 천

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․ 감	비 고
CCTV 이설	-	11,179	11,179
직접공사비	-	11,179	11,179
간접공사비	-	1,094	1,094
공급가액	-	12,273	12,273
V.A.T	-	1,227	1,227
총공사비	-	13,500	13,500

4		조치계획

❍ 버스정류소 이설비용(13,500천원)은 감리단 보고내용에 의거 설계변경 추진하여 도급비에 반영하고자 함.(협의율 79.85%)

붙 임 : 1. 협의 공문 1부.

2. 감리검토의견서 1부.  끝.