투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시설공사 설계변경 계약요청(전체7회, 4차1회, 남부순환로~오정대로간)

1. 우리본부에서 시행중인 “남부순환로~오정대로간 도로개설공사”에 대하여  아래와 같이 설계변경 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사

나. 공사위치 : 강서구 방화대로 ~ 부천시 봉오대로 삼거리

다. 공사규모 : 도로개설 폭40m(8차로),  연장1.23km

라. 공사기간 : 2010.09.29 ~ 2015.12.30(전체)

2015. 3. 4 ~ 2015.12.30(제4차)

마. 계 약 자 : 보훈종합건설(주)  송계점

바. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충(교통사업특별회계), 남부순환로 ~

오정대로간 도로개설(교통개선분담금), 시설비 및 부대비,

시설비 (401-01)

사. 설계변경 내역

구 분		공사금액 및 공사기간
		당 초	변 경	증 ․ 감
전체 7회	도급비	10,864,000,000원	11,392,000,000원	(증)528,000,000원
	관급비	3,147,670,000원	3,097,850,000원	(감) 49,820,000원
	총공사비	14,011,670,000원	14,489,850,000원	(증)478,180,000원
	공사기간	‘10.09.29 ~ ’15.12.30 (1,919일)	‘10.09.29 ~ ’15.12.30 (1,919일)	변경없음
4차 1회	도급비	5,502,061,010원	6,030,061,010원	(증)528,000,000원
	관급비	2,289,823,190원	2,236,890,000원	(감) 52,933,190원
	총공사비	7,791,884,200원	8,266,951,010원	(증)475,066,810원
	공사기간	‘15.03.04 ~’15.12.30 (304일)	‘15.03.04 ~’15.12.30 (304일)	변경없음

※ 설계변경 계약심사 대상 여부 : 비대상 (붙임 5. 심사 대상 여부 검토서 참조)

- 공사기간 : 변경없음

- 변경사유 : 현장여건 변동에 따른 물량 증감 사항 설계 반영

첨부 : 1. 보고서 1부.

2. 변경설계내역서 (전체7회) 1부.

3. 변경설계내역서 (4차1회)  1부.

4. 합의각서 1부.

5. 설계변경 심사대상 여부 검토서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	김상도		광역도로과장	代한병찬		토목부장	전결 08/10 노우성
협조자	계약1팀장	김점선
시행	토목부-16629	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	ironksd@seoul.go.kr	/	부분공개(7)