문서번호	마곡조성담당관-2162
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
신기호	서귀동	한민희		03/12 서노원
협 조
	주무관		마승래

단지조성 공정점검회의 결과보고(19차)

2014. 3

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

단지조성 공정점검회의 결과보고(19차)

Ⅰ		점검개요

일   시 : ′14. 3. 11(화) 14:00~16:30

장   소 :  마곡1공구 현장사무실, 현장 일원

참 석 자 : 마곡조성담당관 (담당관, 토목계획팀장, 담당)

SH공사 (토목조경팀장, 담당)

현장 소장․감리단장(1▪2공구, 빗물펌프장)

안   건 : 단지조성 공정 진행상황 점검 및 추진대책

〔공정현황〕

○ 단지조성공사 : 공정률 70.0% ('14. 3.11 현재)

- 간선하수박스   : 1,115m중 1,105m 완료 (99.1%), 3공구 제외

- 공동구(1공구)  : 1,158m중 1,070m 완료 (92.4%)

(2공구) : 1,506m중 1,442m 완료 (95.7%)

※ 실공정(설계변경시) : 1공구 60%, 2공구 48% 내외

○ 신설 빗물펌프장 : 공정률 38.4%

- 펌프장 구조물 : 2펌프장 상부 건축공사, BTR 강관추진

○ 유비쿼터스도시건설공사(U-CITY) : 공정률 14.7%

- 1지구 정보통신인프라 관로공사 진행

Ⅱ		점검결과 및 조치

해빙기 공사장 안전관리 및 수방대책 수립 철저

- 공사장 안전관리 취약시기인 해빙기가 도래함에 따라 안전점검 강화

- 공항로 횡단 하수박스에 지장되는 통신구 이설이 조속히 이루어지도록 KT측과 협의하고, 필요시 시와 공동 대응

- 임시저류조에서 신설저류조로 연결되는 양천길 횡단 강관(D2000×6공) 시공과 신설저류조 및 공항철도 하부 횡단박스 준설을 우기전 완료

기반시설 공정이 전반적으로 늦은 감이 있으므로 공정 만회

- 1지구는 APT 입주시기에 맞추어 완료될 수 있도록 특별 공정관리하고, 입주대비한 기반시설 공정을 매주 점검하여 보고

9호선 마곡나루역 출입구 추가 신설건 조속 추진

- 마곡나루역은 기존 출입구(1번)를 이용하여 5월에 개통예정이므로 2번 출입구에 대해서도 설치시기를 앞당길 수 있도록 노력

- 마곡나루역 개통 대비 메트로 9호선측 요청사항 협조

포장계획에 대해서는 시 지침 및 유관부서 의견 반영

- 보도블록 시공은 인수기관(강서구청) 및 보도환경개선과와 협의 추진

- 버스전용차로(주행차로, 정류장) 포장 설계기준이 도로관리과에서 통보되었으므로 동 기준에 따라 시공

공정관리 및 대외 협의시 유관기관간 공조체계 강화

- 시, SH공사, 시공사 및 감리단, 강서구, 도시철도공사, 시설물 관리기관 등 공사관련 유관기관간 원할한 협조를 위한 공조체계 강화