등록번호	도시철도토목부-10178
보존기간	1년
결재일자
공개여부	대시민공개

주무관		토목2과장	도시철도토목부장	결재
이경훈		방영복	08/10 김진팔
협 조	주무관		황왕연
	주무관		유원하

코엑스몰연결출입구 T/F팀 일일보고 (2015.08.08. 土)

구 분	작 업 내 용 (금일)	작 업 계 획 (명일)	비 고
토목	○ 구조물공사 - 4-1, 2스판 벽체 거푸집 및 동바리 - 코엑스몰 연결구간 보강 - 토공 되메우기 : 150㎥ ○ 포장복구 - 지장물 복구작업	○ 구조물공사 - 4-1, 2스판 벽체 거푸집 및 동바리 - 코엑스몰 연결구간 보강 ○ 포장복구 - 지장물 복구작업
건축	○ 금속수장공사 - 평지부 천정 캐링 T-BAR설치 - 경사부 천정 앙카 및 달대 설치 - 경사부 벽체,기둥 하지철물	○ 금속수장공사 - 평지부 천정 캐링 T-BAR설치 - 경사부 천정 앙카 및 달대 설치 - 경사부 벽체,기둥 하지철물
기계	○ 제연덕트 작업 ○ 동파방지 열선 판넬 결선	○ 제연덕트 작업 ○ 동파방지 열선 판넬 결선
전기	○ 전력전등 소방 배관배선 공사	○ 전력전등 소방 배관배선 공사
통신	○ 준비 작업(자재 발주 외)	○ 준비 작업(자재 발주 외)

붙임 : 공정진행 현황사진 1부. 끝.