함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	기성금 지급에 따른 선금 및 노무비 수정 정산

우리 정수센터에서 발주한 아래 공사의 기성검사로, 행정자치부예규 제23호(2015.06.23) “지방자치단체입찰 및 계약집행기준의 제6장 선금 ․ 대가 지급요령”에 의거 아래와 같이 선금 및 노무비 수정(당초 5~6월 노무비만 공제하였으나, 7월 노무비 신청으로 추가 공제) 정산 후 기성금을 지급하고자 합니다.

가. 공사내역

1) 공사명 : 1정수장 응집 ․ 침전지 보수공사

2) 계약상대자 : 금오토건(주) 김옥란

3) 계약금액 : 금797,642,376원

4) 계약일 : 2015.04.28

5) 계약기간 : 2015.04.28. ~ 2015.10.30

나. 선금 및 노무비 정산 후 기성금 지급액

1) 선금 지급액 : 금280,000,000원

2) 노무비 지급액 : 금94,237,000원(5 ~ 7월)

3) 금회 기성금 신청액 : 금560,560,000원

4) 현재공정 : 2015.08.06 기준 누계 70%

5) 선금 정산액 :  선금액 × 기성부분의 대가 상당액

계약금액

280,000,000 × 560,560,000

797,642,376        = 196,776,000원

6) 노무비 정산액 :  61,622,000원

7) 기성금 지급액 : 기성금 신청액 - 선금 정산액 – 노무비 정산액

560,560,000 – 196,776,000 – 94,237,000 = 269,547,000원

8) 예산과목 : 자본적지출, 유형설비자산, 구축물, 시설비      끝.

주무관	변민용		행정관리과장	손수곤		소장	08/10 유성종
협조자
시행	행정관리과-7596	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02)3146-5712	/전송	02)3146-5707	/	byunmy@seoul.go.kr	/	대시민공개