투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	영등포구청장(도로과장)
(경유)
제목	설계도서 보완 요청

1. 영등포구 도로과-2421호(2015.2.12)와 관련입니다.

2. 「당산동~샛강생태공원간 보행육교 설치공사」는 현재 공사계약(착수 2015.6.19)되어 진행되고 있으며, 건설사업관리업체(책임기술자)로부터 시공전 설계도서 검토 결과 의견이 제출되어 검토한 바, 지장물의 규모,위치가 설계도서와 불일치, 현장여건이 반영되지 아니한 가시설 계획, 공종별(단계별) 교통처리계획 누락 등 설계도서 보완(재설계)이 시급한 실정입니다.

3. 특히 교각의 경우 기초파일과 지장물(가스관)이 중첩되는 등 재설계가 요구 되는 사항으로 당 현장 여건상 보완(재설계)이 완료된 후에나 토공사(가시설, 기초파일 등) 시공이 가능한 사항으로 전체 공정계획에 차질이 우려되는 실정이오니 조속한 시일내 처리될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 설계도서 보완사항 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	조운행		기반시설과장	한흥태		시설부장	08/11 박상돈
협조자
시행	기반시설과-511	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0649	/전송	02-3780-0774	/		/	부분공개