문서번호	시설보수과-6246
결재일자	2015.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	08/11 조병준
협조

서울교 보수공사 실정보고(관급자재 구매)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

현장실정 검토보고

2015.8.6. 기 보고한 “2015년 서울교 보수공사 현장 실정보고”와 관련, 추가 변경사항에 대하여 보고 후 공사추진에 만전을 기하고자 함

※ 기보고 공문 : 시설보수과-6116호(2015.8.6.)

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : “2015년 서울교 보수공사”

공사기간 : 2015.6.17. ~ 2015.12.13.

공사개요 : 개질아스콘포장 63.87a, 도막방수(슈프림데크코트 M6) 6,387㎡, 중분대차수조인트 236m, 균열보수 169m, 표면보수 236㎡ 등

도 급 액 : 709,642,900원

계 약 자 : 류진산업㈜ 대표 장혜자, (유)윤진종합건설 대표 박용

감독기관 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		보 고 내 용

관련근거 : 시설보수과-6116호(2015.8.6.)

상기 보고내용에 의거 당초 계약물량외 시공이 필요한 것으로 검토된 추가공사를 추진하면서 소요되는 추가 예산은 본 공사의 낙찰차액 일부와 우리사업소 2015 일상유지보수공사 예산중에서 사용코자하였으나

본공사의 잔여 낙찰차액을 사용하여 증가되는 관급자재를 일괄 구매(2015 일상유지보수공사 시행구간 관급자재 포함)한 후, 시공하는 것이 타당한 것으로 검토됨

Ⅲ		검토결과(처리의견)

상기 보고내용과 같이 당초 계약물량외 추가되는 물량에 따른 소요예산은 본공사 낙찰차액을 우선 반영하고 부족분에 대해서는 일상유지보수공사(연간단가) 예산을 활용하여 조치토록 하고 추후 설계변경시 정산․반영코자 함

공사물량 및 (변경)공사비 내역(개략)

공 종	단위	총괄	당초	변경	증‧감	일상유지 (연간단가)	비 고
1. 절삭후 아스팔트 덧씌우기	a	104.08	63.87	69.55	증) 5.68	증) 34.53	증) 40.21
2. 교면물빼기 성형줄눈설치	m	944	472	944	증) 472	0	증) 472
3. 교면물빼기 주입줄눈설치	m	944	472	944	증) 472	0	증) 472
4. 아스팔트 균열보수	m	-	300	-	감) 300	0	감) 300
5. 교면방수(바탕처리)	㎡	10,408	6,387	6,955	증) 568	증) 3,453	증) 4,021
6. 교면방수 (슈프림데크코트 M6)	㎡	10,408	6,387	6,955	증) 568	증) 3,453	증) 4,021
7. 차선도색	㎡	476	266.3	476	증) 209.7	0	증) 209.7
8. 개질아스콘	ton	1,957	1,210	1,308	증) 98	증) 649	증) 747
9. 폐기물 운반 및 처리	ton	1,957	1,210	1,308	증) 98	증) 649	증) 747
도급비	천원	1,034,000	709,643	756,000	증)46,357	증)278,000	증)324,357
관급자재	천원	188,000	130,680	188,000	증)57,320	0	증)57,320
	ton	1,957	1,210	1,975	증) 747	0	증) 747
이전비	천원	56,000	37,595	37,000	증) 405	증)19,000	증)19,405
총공사비	천원	1,278,000	877,918	981,000	증)104,082	증)297,000	증)401,082

붙임 :  (기 보고) 현장 실정보고서 1부.  끝.