문서번호	도시철도사업부-7178
결재일자	2015.8.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
안창호		최광무	08/12 代박용우
협조

- 우이 ~ 신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구) - 휴일작업 등에 따른 감리근무계획 승인검토 보고 (2015년 8월 3주차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8월

도시철도사업부

휴일 및 연장 작업계획에 따른 감리근무계획 승인 검토보고

(우이 2공구)

우이～신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(2공구) 건설공사 관련 시공사의 휴일 및 연장작업 근무계획(8월3주)에 대하여 책임감리원이 시공사에 이를 승인 통보하고, 책임감리 근무계획 승인 신청에 대한 검토 보고임.

근무(8월3주차) 승인 요청내용

관련근거 : 우이신설(2공구) 제15-396호(2015.8.11)

근무일시

- 휴일근무 : 2015.8.14(토), 8.15(일)

휴일근무 계획

관련근거

- 입찰안내서 제4장 계약조건 제14조 및 제6장 6.2(휴일 및 야간작업요령)

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 제5조③항(감리원의 근무수칙)

근무사유

- 연속적인 공정추진과 작업시행, 안전관리를 통해 지연된 본선구간 토공 및 가시설공, 구조물공 작업 등 원할한 공정을 추진하고 시민불편 해소와 안전 및 품질관리 만전을 기하기 위함.

승인조건

- 휴일작업에 감리원은 관련규정에 따라 근무하며 감리비는 시공사 부담   (입찰안내서 제6장 6.2 규정에 의거 원인자 부담)

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주하여 정위치에서 근무하도록 감독 할 것

- 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독 할 것

휴일근무 주요내용

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
8월14일(금)	2구역 (5정거장)	외부#1 벽체 철근 조립(토목,15명) 현장정리정돈(전기,4명) 압출성형시멘트판넬철물설치(건축,10명)	*** ***	******
	4구역 (7정거장)	외부출입구#1 벽체 방수작업, 버팀보해체(토목, 15명) 4층 변전실 바닥 트렌치 앵글 설치(건축, 10명)		******
8월15일(토)	2구역 (5정거장)	외부#1 벽체 철근 조립(토목,15명) 현장정리정돈(전기,4명) 압출성형시멘트판넬철물설치(건축,10명)	*** **	******
	4구역 (7정거장)	외부출입구#1 벽체 방수작업, 버팀보해체(토목, 15명) 4층 변전실 바닥 트렌치 앵글 설치(건축, 10명)		******

휴일작업 근무자

일자	구분	직 무	성 명	비 고
8.14(금)	감리단		******
	시공사	공사팀	******
			******
		공무팀	******
			******
			******
		안전팀	******
		품질팀	******
		건축팀	******
		전기팀	******
		관리팀	******
			******
			******
8.15(토)	감리단		******
	시공사	공사팀	******
			******
		공무팀	******
			******
		안전팀	******
		품질팀	******
		전기팀	******
		관리팀	******

검토결과

책임감리원 검토의견

- 시공사에서 승인 요청한 휴일 작업계획를 검토한 결과 적정한 것으로 판단 되어 관련규정에 따라 승인함이 타당함.

조치계획

검토의견

- 책임감리원의 검토내용과 같이 작업의 연속성과 적정한 공정추진을 위해  휴일작업 및 감리원의 휴일근무 계획에 대하여 아래 업무 지시사항을 준수하는 조건으로 승인코자 합니다.

업무지시

- 감리원은 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

- 감리자 및 현장 공사관리자는 휴일, 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

- 휴일 작업 등 계획의 변경시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행토록 할 것

- 지하매설물 관련규정을 숙지하여 이행하고 위험작업 등의 안전관리 철저

- 공종별 안전관리자를 지정하여 작업시 안전관리 철저

- 사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련절차에 따라 상황 보고토록 할 것

- 작업구간 순찰 점검(2회) : 안전관리, 도로침하 및 파손, 화재예방 점검 등 철저

- 휴일작업시 소음, 진동발생, 교통관리 등 작업관리 철저

- 소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원발생 등 관리철저

첨부 : 1) 휴일 작업에 따른 감리근무계획 승인요청(2015년8월3주차)  1부.

2) 휴일작업계획서 1부.  끝.