문서번호	공간정보담당관-8766
결재일자	2015.8.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보기획팀장	공간정보담당관
김우철		박대군	08/12 조봉연
협조
	주무관		곽인선

2015년 서울특별시 지리지 제작 및 발간 사업 월간 보고(7월)

2015. 8.

정보기획관

(공간정보담당관)

월 간 업 무 보 고 서

사업명	서울특별시 지리지 제작 및 발간
수신처	서울특별시 공간정보담당관	발신처	(사)대한지리학회
사업기간	2015. 7. 1. ~ 2015. 7.31.	보고일	2015. 8. .
주요 내용	집필진 및 편집진 전체회의 지리지 항목 구성안 수정 집필 진행

1. 주요 진행 사항

항목	주요 사항	진행일
과제 운영	집필진 편집회의	2015. 7. 6.
조사 및 집필	집필진 자료조사 및 분석 집필 착수	2015. 6. 15. ~ 2015. 6. 15. ~
편집 및 심의	지리지 항목 구성안 수정	2015. 7. 13.
자문 및 감수	발간항목 수정	2015. 7. 13.
교열 및 인쇄

2. 금월 업무 진행 현황

	업무 진행 현황	진행일정	진행여부
과제 운영	집필진 및 편집진 전체회의 - 회의록 첨부	7/6	100%
조사 및 집필	집필진 자료조사 및 분석 집필 착수	6/15 ~ 8/15 6/15 ~ 8/31	75% 60%
편집 및 심의	집필(편집)구성안 작성 - 항목 첨부	7/13	100%
자문 및 감수	발간항목 수정 - 집필(편집) 구성안과 같음	7/13	100%
교열 및 인쇄

2015 서울특별시 지리지 제작 및 발간                                                         (사)대한지리학회

3. 익월 업무 진행 현황

	업무 진행 현황	진행일정	진행목표
조사 및 집필	집필진 자료조사 및 분석 (3월차) 집필 착수 (3월차)	6/15 ~ 8/15 6/15 ~ 8/31	100% 100%
편집 및 심의	교정본 가안 확인	8월초	50%
자문 및 감수
교열 및 인쇄	인쇄 및 출판 예산 협의 인쇄 및 출판 일정 협의	~ 8/31 ~ 8/31	100% 100%

2015 서울특별시 지리지 제작 및 발간                                                         (사)대한지리학회

4. 산출물 관리

산출물 명	주요 내용	파일 명	상태
과제 운영	편집진 편집회의 회의록	서울지리지 집필회의록(150706).hwp
조사 및 집필
편집 및 심의	집필(편집)구성안	서울지리지 집필구성안(150713).hwp
자문 및 감수
교열 및 인쇄

5. 월간보고 회의내용

주요내용

집필취합본 내용 검토 및 확인

- 진도50%로 양호하나 8월말까지 취합독려

- 자문위원회 내용검토 및 서울시 특화 강조

2. 중간보고회 일정 및 추가 진행사항 회의

- ~8/28 : 1차 원고 취합마감

- ~9/4 : 편집위원회 원고 검토 및 서울시와 집필위원회에 검토의견 통보

- ~9/25 : 검토의견에 대한 재집필 및 수정

- 10/2 ~ 10/7 : 중간보고회 개최예정에 따른 최종 자료 작성

6. 주요 추진일정 개관

구 분 기 간		제1월		제2월		제3월		제4월		제5월		제6월		제7월		제8월
계획수립 준비	발주 및 과업시행계획서 제출
	편집진, 집필진 구성 및 세부계획 수립
	자문위원회 구성
조사, 자료수집 및 분석, 초안 작성	발간내용 확정
	집필진 자료조사 및 분석
	집필 원고 초안 작성
편집 및 심의	발간내용에 대한 편집회의
	발간내용 초안 마련
	편집자료 수집
감수, 자문, 심의	초고 편집 및 검토
	교정본 가안 확인 및 초벌 인쇄
	심의 요청
심의결과 조치, 인쇄 및 제출	추가 교열 및 심의결과 반영
	인쇄작업
	최종본 완성
	전자책 완성

***********************

****************************