함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	양천구청장(도로과장)
(경유)
제목	폭염에 따른 공사일정 조정(신월동55번지외7개소 배급수관정비공사)

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 시행한 “신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사” 관련 신정동 1050-1~1023-12간(신정동1050-1~1048-18간 : 공사완료) 중 일부 구간이 공사 진행중에 있으며

3. 서울지역 폭염경보 발령에 따른 공사 근로자의 안전과 단수로 인한 시민 불편을 해소코자 진행중인 공사를 일시 중지하고 아래와 같이 착공코자 하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사위치 : 양천구 신정동1048-18~1023-12간

다. 공사일정 : 2015년 9월초

라. 도로복구기관 : 양천구청 도로과

붙 임 : 1. 서울지역 폭염경보 발령에 따른 안전관리 강화. 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	여수현		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	08/12 조면행
협조자
시행	급수운영과-19534	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	대시민공개