문서번호	조경지원과-5027
결재일자	2015.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경지원과장
임은희		08/12 김제중
협조	주무관		이전호
	주무관		代임은희

『2015 시민의숲 숲가꾸기 사업』

준공기한 연기 검토 보고

2015. 8.

동부공원녹지사업소

조경지원과

『2015 시민의숲 숲가꾸기 사업』

준공기한 연기 검토 보고

2015 시민의숲 숲가꾸기 사업 추진과 관련하여 폭염 등 무더위로 인해 작업장 안전사고 예방을 위해 다음과 같이 준공기한을 연기코자 보고 드림

1		사업 개요

○ 사 업 명 : 2015 시민의숲 숲가꾸기 사업

○ 위    치 : 서초구 매헌로 99 시민의 숲 (양재2동 236-1외 1필지)

○ 사업기간 : 2015. 7. 22 ~ 8. 18

○ 도급업체 : 서울시산림조합 김덕현

○ 도급금액 : 14,796,000원

○ 사업내용 : 시민의 숲 위험수목 제거, 대형수목전정, 가지치기 등

2		준공기한 변경

○ 연기사유

- 공사착공 후 폭염 특보 등 무더위가 지속되어 작업장 안전사고 등을 예방하기 위해 준공기한을 연기코자 함.

(착공일인 22일 이후 현재까지 서초구 30°이상 고온일수 17일)

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2015. 7. 22 ~ 2015. 8. 18

- 변경 : 2015. 7. 22 ~ 2015. 9.  4 (17일 연장)

○ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

3		행정 사항

○ 준공기한 연기시행 및 의뢰 (공원운영과).

붙 임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.