투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(마을버스 우회를 위한 사전조치 사항 일정 제출)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2015-08-12 00:08:00

3.지 시 내 용

가. 토목부-14964호(2015. 7.20.) 및 강동 교통행정과-37285호(2015.8.10.)와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 강동구로부터 고덕산 구간 종단 인하 계획에 따른 마을버스(강동 02번, 강동 05번) 우회 승인을 하여야 하나, 사전조치사항을 이행하지 않고 있어 촉구 공문이 제출되었는바, 고덕로 61길에 대한 구체적인 공사일정 및 조치계획을 2015. 8.13.(목)까지 제출하여 주시기 바라며,

다. 2015. 9. 1.부터 우회하기로 되어 있는 마을버스 승인이 시공사 등 귀책으로  연기되었을 경우 공사기간 연장 책임은 시공사에 있음을 알려드립니다.

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					08/12 진재섭
협조자
시행			토목부-16847									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개