문서번호	도로관리과-12634
결재일자	2015.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장안전팀장	도로관리과장
이옥휘		임영철	08/13 代최연우
협조

『서울시 예방적 유지보수사업 현장 적용성 평가 용역』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

도시안전본부

(도로관리과)

『서울시 예방적 유지보수사업 현장 적용성 평가 용역』

준공기한 연기 검토 보고

서울시 예방적 유지보수사업 현장 적용성 평가 용역의 공용성 평가를 위해서는 현장조사가 선행되어야 하나 장마철 우천으로 중지되어 절대공기가 부족함에 따라 원활한 용역 수행을 위해 준공기한을 연기하고자 함.

❒ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울시 예방적 유지보수사업 현장 적용성 평가 용역

❍ 용 역 비 : 19,090,000원

❍ 용역기간 : 2015.6.19. ~ 8.18

❍ 용 역 사 : ㈜로드코리아  대표 정철기

❍ 용역내용

- 선진 도심지 예방적 유지보수사업 관련 자료 수집 및 분석

- 예방적 유지보수사업 적용구간 및 미적용구간 현장조사 실시

- 도로포장 상태조사 결과 분석 및 포장상태 정량화 작업

- 예방적 유지보수사업 적용구간 및 미적용구간의 공용성 비교평가

- 예방적 유지보수비용 대비 공용성 상승효과 정량화

- 예방적 유지보수 공법의 경제성 분석 및 경제적 타당성 조사

- 예방적 유지보수 공법의 적정 적용시기 결정 및 적정단가 제시

❒ 추진내용

❍ 2015.4.27. : 평가계획 수립

❍ 2015.6.19. : 용역 계약 및 착공

❍ 2015.7. 1. : 용역 착수보고

❍ 2015.8. 4. : 자문 및 실무담당자 의견수렵(1차)

❒ 검토내용

❍ 준공기한 연기

- 당 초 : 2015.8.18

- 변 경 : 2015.8.31.(13일 연기)

❍ 사   유

- 예방적 유지보수사업 공용성 평가를 위해서는 현장조사(육안조사, 포장상태 조사, 지지력조사, 코어채취 등)가 선행 되어야 하나 장마철 우천으로 현장조사가 중지(13일)되어 절대공기 부족

❍ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

❒ 조치의견

❍ 상기와 같이『서울시 예방적 유지보수사업 현장 적용성 평가 용역』 준공기한을 연기하여 현장 적용성 평가에 철저를 기하고자 함.

붙임 1) 준공기한 연기요청 공문 1부.

2) 준공기한 연기요청서 1부.  끝.