투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 2015년 광나루한강공원 운동시설 정비공사 (제2회)

1. 녹지관리과-3543(2015.08.11.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 계약이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 현 황	공 사 명	2015년 광나루한강공원 운동시설 정비공사
	계약상대자	정로건설 주식회사 (대표 : 이강태)
	변경계약일자	2015.08.12
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경(감 5,071,000원), 공기 변경 없음
	변경사유	현장 여건 및 주민 건의사항 반영을 위한 설계변경
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.06.10	변경후 착공일자	2015.06.10
	변경전 준공기한	2015.08.15	변경후 준공기한	2015.08.15
금 액 변 경	변 경 전	247,203,000 원
	변경금액	(감) 5,071,000 원
	변 경 후	242,132,000 원

붙     임 : 1. 변경계약체결통보서 1부

2. 설계변경내역서 1부. 끝.

	총무부장
주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	08/13 이상국
협조자
시행	총무과-13733	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개