문서번호	토목부-17055
결재일자	2015.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
장기철		서관석	08/17 노우성
협조
	주무관		오열상

준공기한 연장(총괄1회, 5차1회) 검토보고

(월드컵대교 건설공사 폐기물처리용역)

2015. 8.

도시기반시설본부

(토 목 부)

준공기한 연장(총괄1회, 5차1회) 검토보고

(월드컵대교 건설공사 폐기물처리용역)

『월드컵대교 건설공사』준공기한 연장계획에 따른 폐기물처리용역 총괄 및 5차 계약 준공기한 연장 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 폐기물처리용역 준공기한 연장(전체, 5차) 승인 요청

[월드컵(감리)2015-356(2015. 8. 4.)]

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 월드컵대교 건설공사 폐기물처리용역

○ 용역규모 : 폐콘크리트 12,900ton, 폐아스콘 6,150ton

○ 용역기간 : ‘11. 9.22. ～ ’15. 8.20. (5차 : ‘15. 2.12. ～ ’15. 8.20.)

○ 용 역 비 : 350,829천원 (5차 : 50,000천원)

○ 용 역 사 : 문화기업㈜

Ⅲ		보고내용

○ 준공기한 연장사유

- 당 시설공사 준공기한(2015. 8.22. → 2020. 8.31.) 연장계획에 따라 폐기물처리용역 총괄 계약기간 연장(2015. 8.20. → 2020. 8.31.)이 필요하며,

- 당초 총괄 계약기간에 맞춰 계약한 5차 용역 준공기한도 연장(2015. 8.20. → 2015.12.31.)이 필요한 실정임.

○ 용역기간 변경현황 (용역비 변경없음)

구 분	당 초	변 경	증 ∙ 감	비 고
총 괄	2011. 9. 22. ∼ 2015. 8. 20.	2011. 9. 22. ∼ 2020. 8. 31.	증 1,838일
5 차	2015. 2. 12. ∼ 2015. 8. 20.	2015. 2. 12. ∼ 2015. 12. 31.	증 133일

Ⅳ		조 치 의 견

○ 상기 내용과 같이 시설공사 준공기한 연장계획에 맞춰 폐기물처리용역 총괄 및 5차 계약에 대한 준공기한 연장을 추진하여 적기에 폐기물을 처리코자 함.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서(총괄1회) 1부.

2. 설계변경 내역서(5차1회) 1부.  끝.