문서번호	도로보수과-2080
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	강서도로사업소장
박상구	김효식	03/12 이규상

증미산 보강공사

추진 방안 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  3. 12(수)

강서도로사업소

도로보수과

증미산 보강공사 추진 방안 검토 보고

현재 시행중인 증미산 보강공사의 잔여구간 시행여부 등 추진 방안을 검토하고 보고 드림

1		공사 개요

○ 공사명: 증미산 도로사면 보강공사

○ 공사기간: 2013.12.23.~2014.5.12

○ 규     모: 락볼트공 262공 및 면정리 등(도급액 231백만원)

○ 도 급  자: ㈜동아기업 김수홍

○ 현 공정: 10%, 가설비계 설치 중

2		추진 현황

○ 2013.10.09: 예산배정 및 사업시행 지시(←도로관리과)

○ 2013.12.23: 공사 착공(ZONE 2 일부)

○ 2013.12.19: 실시설계 추진방안 검토 요청(→도로시설과,도로관리과)

- 설계 중인 2구역 외 잔여 2개 구역에 대한 설계 필요 여부

○ 2014.02.07: 자문회의 개최(도로시설과)

- 도로사면 상태평가 및 공법 적정 여부 등

○ 2014.02.12: 자문회의 개최 결과 통보(←도로시설과)

- 잔여구간에 대해 정밀한 현장 조사 및 시험값 등 객관적 자료 보완 필요

○ 2014.02.18: 자문회의 관련 의견 제출(사업소→도로시설과)

- 자문 내용 이행에 많은 시일이 소요되어 기 계약된 ZONE 2에 대해서만       설계코자 하며 잔여 구간에 대한 추진 방안 검토 요청

○ 2014.02.21: 자문회의 관련 의견 제출에 대한 회신(←도로시설과)

- 잔여구간에 대해 실제 붕괴 위험이 있는지 실시설계자와 협의 처리 바람

○ 2014.02.21: 실시설계자 의견 제출

- 잔여구간도 인장균열 및 낙석 등에 의해 장기적으로 붕괴 위험 내재,

지질조사 등에 의한 안정성 해석 후 조치하여야 할 것으로 판단됨

○ 2014.02.24: 실시설계 준공

3		검토 사항

□ ZONE 2외 잔여구간 실시설계 시행

○현황

- 설계자 의견: 장기적으로 붕괴 위험 내재, 지질조사 등에 의한 안정성

해석 후 조치하여야 할 것으로 판단됨

- 자문위원 의견: 상세한 현장조사 및 지층단면, 지하수위 조사 등 합리적인         조사 및 평가에 의한 위험성 규명 필요

○문제점

- 구체적인 조사 및 평가를 위해서는 많은 기일이 필요하고 예산이 추가로        소요되며

- 설계자 및 자문위원 의견과 같이 명확한 근거가 부족한 상태에서의 실시설계는        다소 문제가 있는 것으로 판단됨

○조치의견

- 위와 같이 좀더 구체적인 조사계획 등이 필요한 것으로 판단되므로 실시        설계 추진을 중단하고

- 본 사면의 관리부서인 시설관리공단과 도로시설과에서 조치방안을 검토토록        요청하고자 합니다.

□ ZONE 2 잔여부분 시행

○현황

- 당초, 배정 예산에 맞추어 보강이 계획된 ZONE 2의 약1/2 구간만 발주        시행하여 잔여부분에 대한 시행이 필요한 실정임

․잔여구간 소요 공종: 락볼트 220공, 비탈면고르기 259㎡, 낙석방지망 등

․소요 예산: 130,000천원

* 순공사비 100,957천원×낙찰율 87.75%×제경비 1.46

- 사면 현황도

○문제점

- 변위 및 파괴가 우려되어 신속한 보강이 필요한 것으로 조사된 구간이므로        우기전 보강이 필요하며 예산이 미배정된 상태임

○ 조치의견

- 도로시설관리과에 소요 예산의 배정을 요청하고 본 공사에 포함하여 조속히        시행코자 함

붙임 1. 자문회의 의견서 1부.

2. 설계사 의견서 1부.

3. 실시설계 내역서 및 도면 1부. 끝.