함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	노후 송배수관 예산 배정 요청(강서로 노후 배수관 정비)

1. 시설관리과-13391(`15.06.26.)호 관련입니다.

2. 우리사업소 강서로 누수다발 노후 배수관 정비에 대해 공사의 시급성과 ‘15.하반기 SH공사 병행공사를 위해 예산 배정 요청하였으나, 예산부족 등의 사유로 배정이 되질 않았습니다.

3. 이에 우리사업소에서는 강서도로사업소와 SH공사와 협의를 통해 병행공사를 ‘16년 상반기로 연기하였는 바, 사업의 원할한 추진을 위해 2015년 우선 사업비에 대해 아래와 같이 예산배정 요청하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 금회 예산 배정 요청 금액 : 100백만원

나. 예산 사용 계획 : 중간 제수밸브(D1000) 설치 및 교통소통대책 용역 시행

다. 예산 배정 요청 사유

1) SH공사에서 ’15.9월 마곡지구 급수를 위해 부단수차단을 이용한 분기공사 시행예정으로 금회에 중간 제수밸브 설치를 해두면 향후 단수없이 공사가능

2) ‘16.상반기 안에 배수관 정비를 완료하기 위해서는 ’15년도 교통소통대책 용역발주 필요

붙임 : 누수다발 노후 배수관 정비계획 및 관련 공문 각 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	강은영		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	전결 08/17 이자원
협조자
시행	시설관리과-17312	(		)	접수		(		)
우	08013	서울시 양천구 목동 동로 155 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4020	/전송	3146-4039	/		/	대시민공개