시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	재무과장(계약 1팀)
(경유)
제목	용역계약 기간연장 의뢰

1. 재무과-27239(2015.5. 28)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인 ｢서울지역 전력공급시설 현황조사 용역｣에 대한 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 당초 계약내용

- 계 약 명 : 서울지역 전력공급시설 현황조사

- 계약기간 : 2015.5. 29 ~ 2015. 8. 26

- 계약금액 : 금17,100,000원

- 계약업체 : ㈜에이스기술단

나. 변경 계약내용 : 계약기간 연장

- 계약기간 : 2014.12. 4 ~ 2015. 10. 8

- 계약금액 : 금17,100,000원(변경없음)

- 연장사유 : 용역을 위한 필수 자료 수집 기간의 연장

- 연장근거 : 계약상대자 귀책없는 기간연장(용역계약 일반조건 제7절)

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 계약기간 연장보고 1부.  끝.

	녹색에너지과장
주무관	박상현		전력관리팀장	조성태		녹색에너지과장	전결 08/17 권민
협조자
시행	녹색에너지과-16434	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-3708-8620	/전송	02-3708-8659	/	mrpark912002@seoul.go.kr	/	대시민공개