문서번호	급수설비과-5810
보존기간	년
결재일자	2015.8.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	급수설비과장	급수부장
이재학	김기상	08/17 이규상
협 조

상수도공사 건설사업관리용역 (강북지역)

급수공사 주간실적 보고

2015. 8. 17

상수도사업본부

(급수설비과)

상수도공사 건설사업관리용역 (강북지역)

급수공사 주간실적 보고

상수도공사(급수,누수복구,시설물) 강북지역 건설사업감리용역에 대한  용역사로부터 제출된 주간실적을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ. 용역현황

□ 용역개요

○ 용역대상

- 급수공사 분야 (급수공사,불용관,보호통교체,포장 등) : 18,980건

- 누수복구 분야 (누수복구,포장,공사장 입회 등) : 19,836건

- 시설물 분야 (노후밸브교체, 배수지 시설물 등) : 6,076건

○ 용역기간 : 2015. 6. 22 ~ 2017. 6. 21

○ 계약금액 : 4,888,436,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, ㈜건양엔지니어링,(주)신성엔지니어링

□ 인력현황

○ 근무인원 : 34명

- 급수 : 14명, 누수 12명, 시설물 6명, 책임기술자1명, 비상주 1명

Ⅱ. 검토회의 및 주간 추진실적

□ 추진실적

○ 급수공사(건설사업관리기술자)

구 분		건설사업관리기술자			현 장 입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		계	현장입회 (건)	사후확인 (건)
금 주		241	209	32	86.7	1,539	2
누계	’15.6.22 이후	1,293	1,169	124	90.4	5,782	22
	’15.1.1 이후	5,581	5,407	174	96.9	19,890	122

- 시정조치 :  총 2건(안전 1건, 토공 1건)

○ 포장복구공사(건설사업관리기술자)

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)
금 주	163	152	93.3	47	46	97.9	116	109	91.3
누 계	861	813	94.4	246	239	97.2	615	574	93.3

○ 건설사업관리기술자 상호 업무지원

구 분	계				사업소 내				사업소간
	계	급수공사	누수복구	시설물	소계	급수공사	누수복구	시설물	소계	급수공사	누수복구	시설물
금주(회)	12	9	3	0	11	8	3	0	1	1	0	0
누계(회)	61	53	7	1	52	44	7	1	9	9	0	0

붙임 : 건설사업관리용역 주간실적 공문 1부. 끝.