문서번호	문화예술과-2454
결재일자	2015.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	문화진흥팀장	문화예술과장		문화기획관
이훈영	장철민	代류경희		08/17 양현미
협 조
	조직담당관		代최판규

『서울사진박물관 건축·전시·운영계획 수립』

학 술 용 역   추 진 계 획

2015. 8.

문화본부

(문화예술과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

목    차

Ⅰ.	사 업 개 요(안)	1
Ⅱ.	추 진 경 위	2
Ⅲ.	학술용역 추진계획	2
Ⅳ.	자체 학술용역 심의	6
Ⅴ.	향 후 계 획	6

『서울사진박물관 건축·전시·운영계획 수립』

학 술 용 역   추 진 계 획

서울사진박물관 건립타당성 조사 학술용역 수립 후 실시설계 전 중간단계로 건축·전시·운영계획을 수립하고자 함

Ⅰ		사업개요(안)

□ 추진방향

○ 사진, 영상, 필름 등을 총 망라하는 종합적인 (시립)사진박물관 건립

○ 사업 추진을 위한 MP 선정, 추진위 구성․운영 등 전문적인 추진체계 수립

□ 사업개요

○ 위    치 : 도봉구 창동 1-7, 5,970㎡ 부지

- 창동·상계 신경제 중심지 대상 부지(선도사업 부지)

대상부지(창동 1-7)	창동·상계 신경제 중심지

※ 문화체육시설 부지에 국내 최초 아레나급 복합문화공연시설 건립 예정 등 대규모 도시 개발 예정

○  사업기간 : 2015 ~ 2020년

○  시설규모(안) : 지하1층, 지상3층(건축면적 800평, 연면적 2,900평)

○  총사업비(안) : 24,000백만원

Ⅱ		추진경위

○ ‘14.11.3 : 시장요청사항

- 국립 또는 시립으로 제대로 된 사진박물관이 하나쯤 있어야 할 것 같은데 검토 바람

○ ‘15. 1.31 : 시장님 검토지시(비서실장 수명)

- 사진 갤러리 창동 건립 검토

○ ‘15. 3.12 : 문화체육관광부 업무협의

- 국비지원 방안(1안. 전액 국비 건립, 2안. 광특 회계 신청 등) 논의

○ ‘15. 3.30, 4.8 : 전문가 자문위원회 개최(2회)

- 참석 : 김중만, 조세현, 송영숙, 최시영 등 사진, 건축 분야 등 전문가

- 내용 : 추진방향, 건립 시설규모(안) 등 논의

○ ‘15. 5. 22 : 문체부 제 1차관 면담(국립 사진박물관 건립 건의)

- 참석 : 문체부(제1차관, 시각예술디자인과장), 서울시(문화체육기획관, 문화진흥팀장)

- 면담결과 : 국립으로 서울시에 사진박물관 건립 불가

⇒ (시립) 서울사진박물관 건립 추진

Ⅲ		학술용역 추진계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 :『서울사진박물관 건축·전시·운영계획 수립』학술용역

○ 과업기간 : 계약일로부터 5개월

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

- 연구 용역기관의 신뢰성 확보를 위해 용역 수행에 필요한 인력을 갖추고, 유사 용역을 수행해 본 경험이 있는 기관과 우선 협상

○ 소요예산 : 70백만원(‘16년 문화예술과 예산 편성 예정)

□ 주요 과업내용

건축계획 수립

○ 건축 기본개념 및 특성 연구

○ 환경조사 및 여건 분석

- 자연 및 인문환경 조사 분석

- 대지의 역사환경 분석(대지의 역사적 의미, 문화적 잠재력과 비전 등)

- 입지 여건(대지 특성, 접근 및 교통체계 분석, 주변시설과의 연계)

- 관련계획 및 법규 검토

- 현황 및 기초자료 분석 및 활용성 검토(지질·지적 현황 분석 등)

○ 국내외 관련시설 사례조사 및 분석

- 국내외 사진박물관 분석(사진박물관 기능, 현황 등 분석)

- 국내외 관련 문화시설 분석(복합 문화시설, 국내외 관련 문화시설 현황 등)

- 사례분석 종합과 시사점 도출

○ 기능 및 규모계획

- 기능 프로그램(공간·동선 체계 등 연구)

- 시설규모 검토(적정규모 추정, 주요영역 규모 추정)

- 공간 프로그램(기능별 영역 구분 및 면적 배분계획, 각 영역별 세부 면적 산출 및 지표 설정, 영역별 면적 종합)

○ 건축 프로그램 연구

- 배치계획(배치의 기본방향, 기본 조건 등)

- 건축계획(도시적 측면, 대지계획 측면, 실내 공간적 측면 등)

- 분야별 설계요건(건축, 구조, 기계설비, 전기 및 통신설비, 조경, 조명, 시공, 관리 분야 등)

○ 사업추진계획 수립

- 건립 사업방식, 사업비 등 검토

- 단계별 건립 추진일정 수립

전시계획 수립

○ 전시계획

- 전시 기본개념 수립(전시 목표, 전시의 방향과 전략)

- 전시 체계 연구(전시의 시·공간적 범위, 전시 주제 및 구성)

- 전시 시나리오 구성

○ 전시매체 및 기법 연구

- 기본방향 연구(전시물의 형태 유형 분류, 전시물 설치 방법의 유형 등)

- 주요 전시매체 및 기법 연구(실물, 영상·음향 매체, 터치스크린 등)

- 전시 기법(전시의 구성요소, 전시기법의 분류, 전시기법의 구성 방법 등)

- 첨단기술 활용 전시 방안

○ 첨단기술 활용 전시 방안

- 구현요소, 구성단계, 적용가능한 기술 연구

- 옥외 전시공간 구성(옥외 전시공간의 유형, 공간구성 방향 등 연구)

○ 전시환경

- 전시환경계획의 개념, 목표, 범위 설정

- 관람환경과 전시동선 계획 수립(공간·동선 체계의 유형과 전시방식 연구)

- 물질·매체 기준 전시환경 계획(빛, 공기, 색체, 영상, 음향 환경 등)

- 소방·방재 기준 전시환경 계획(소방, 보안, 재해 대책)

- 환경 관리 프로세스(환경 관리 범위 설정 등)

○ 소장품 수집 및 수장 기본계획 수립

- 수집계획(수집목표, 수집범위, 수집전략, 실행방안)

- 수장계획(개관 준비기 수장정책, 임시수장고 구성방안 등)

- 아카이브 구축(사진·영상 아카이브, 디지털 아카이브화 추진 등)

○ 전시대상 자료목록(안) 구축

- 조사방법, 분류, 상설전시 대상 자료 목록(안) 구축

운영계획 수립

○ 운영의 기본방향, 목표, 전략 등 수립

○ 운영 프로그램 기본계획

- 기능 활동 프로그램

‣ 수집·보존, 전시, 조사·연구, 교육, 자료운영, 문화 서비스지원 활동 등

- 교육 프로그램

‣ 교육 프로그램 구축 목적

‣ 교육 프로그램을 위한 고객 분석

‣ 국내외 박물관 교육 프로그램 사례 분석

‣ 활동 프로그램 구성

‣ 교육 프로그램 기본방향, 구성, 개발 등

‣ 교육 강사 운영 지침

‣ 자원봉사자 운영 지침

‣ 문화 프로그램 운영방안 등

- 기타, 정보화 프로그램, 유관기관(인근 문화시설) 연계 프로그램 등 연구

○ 운영체계

- 조직의 기본방향, 조직 직무분석, 조직체계 구성 등

○ 운영예산 계획

- 주요항목 운영계획, 지출예산 추정, 운영수입 추정 등

○ 관리 운영 프로그램

- MI(Museum Identity) 계획, 시설 일반관리, 자동제어 설비, 방재·보안 시스템, 시설관리 운영 조직 등

□ 용역결과 활용계획

○ 문체부 공립박물관 건립타당성 사전평가, 투자심사 준비 등에 활용

○ 기본·실시설계 용역에 반영하여 용역 구체화

Ⅳ		자체 학술용역 심의

○ 추진근거

- 서울특별시 학술용역 심의회 설치 및 운영에 관한 조례 제9조

- 2015년 학술용역 추진지침(조직담당관-15653호, 2014.12.31.)

○ 자체 학술용역 심의회 구성(7명)

- 내부위원(3) : 문화체육기획관, 문화정책과장, 문화예술과장

- 외부위원(4) : 이경훈(위원장, 국민대 교수), 손영주(한미사진미술관 수석큐레이터), 이경민(사진아카이브연구소 소장), 이경률(중앙대 교수)

○ 심의회 운영

- 심의방법 : 서면심의 (심의일자 : ‘15. 8.14(금))

※ 과업내용서를 서면으로 송부하여 심의하고, 심의의결서에 적정 여부 표기

- 의결방법 : 대상위원 2/3이상 참여, 참여위원 과반수 이상 찬성으로 의결

- 심의내용 : 학술용역 과제의 필요성 및 타당성, 학술용역 사업계획 · 수행기간 · 용역비 등의 적정성, 과업지시 내용의 적정성 등

○ 소요예산 : 200천원(심사수당, 외부위원 4명 × 50천원)

- 예산과목 : 문화예술과, 문화예술진흥, 문화예술육성 지원, 문화예술공연 진흥, 사무관리비(201-01)

Ⅴ		향후계획

○ ‘15. 9월       : 학술용역 정기심의(조직담당관)

○ ‘16. 1월       : 용역업체 공모

○ ‘16. 2월       : 용역수행업체 선정 및 계약

○ ‘16. 2 ~ 7월  : 학술용역 수행(5개월)

붙임 : 1. 사업계획서 1부

2. 자체 학술용역 심의의결서 양식 1부.  끝.