투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	'곰사 환경개선공사' 관급자재 조달구매(변경) 요청

1. 조경과-2771(2015.05.21)호 및 총무과-7958(2015.05.26)호와 관련입니다.

2. 『곰사 환경개선공사』 관급자재 조달구매에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 조달구매

나. 품    명 : 하드우드 목재/이노블록

다. 구입내역 - 변경없음

품 명 (식별번호)	규 격	단위	단가	수량	금액	조달수수료	비고
하드우드 (22552605)	W100*30T	㎥	62,000	299	18,538,000	100,100
콘크리트블럭 (21558664)	200*200*T60	㎥	28,500	854	24,339,000	131,430
합 계					42,877,000	231,530

라. 변경내역

- 당초 납기일자 : 2015. 8. 21

- 변경 납기일자 : 2015. 9. 30

마. 변경사유 : 현장 여건등으로 인하여  『곰사 환경개선공사』 준공기한 변경으로 인하여 납품기한 연기.  끝.

	조경과장
주무관	호명옥		주무관	이옥하		조경과장	08/17 강인호
협조자	주무관	최영은		총무과장	이경로
시행	조경과-4280	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7551	/전송	02-500-7993	/		/	부분공개(5)