투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신	내부결재
(경유)
제목	다솜관 옥상 공원조성 및 옥상방수 설계용역 준공기한 연기

1. 『다솜관 옥상 공원조성 및 옥상방수 설계용역』의 과업수행 지연  사유가 발생하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

▣ 용역개요

가. 용 역 명 : 다솜관 옥상 공원조성 및 옥상방수 설계용역

나. 계 약 자 : 주) 지호도시건축사사사무 대표 윤지호

다. 계약금액 : 금 12,000,000원

라. 예산과목 : 인재원청사 보수□보강, 시설비(401-01)

마. 계 약 일 : 2015년 07월 20일

바. 착 수 일 : 2015년 07월 21일

사. 준 공 일 : 2015년 08월 18일

2. 위 용역의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기준공기한 : 2015년 9월 11일

나. 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 연기사유 : 다솜관 옥상공원 조성을 로즈홀 내부환경 개선으로                       변경하고, 설계용역(안)에 대한 다각도 의견반영 등에 따른 공기부족.

붙임 : 1) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기 요청(설계자) 및 다솜관 옥상공원 조성관련 검토의견서 1부.  끝.

주무관	남성준		시설재무팀장	박계완		인재기획과장	08/17 박기용
협조자
시행	인재기획과-10460	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울특별시 서초구 남부순환로340길 58	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	3488-2051	/전송	3488-2346	/		/	대시민공개