문서번호	방재시설부-10999
결재일자	2015.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	08/18 임춘근
협조

- 경춘철교 정비공사 -

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

도시기반시설본부

(방재시설부)

준공기한 연기 검토 보고

《 경춘철교 정비공사 》

사업개요

공 사 명 : 경춘철교 정비공사

공사개요

- 경춘철교 보수보강 (L=176.5m, B=3m)

- 상판 포장 및 시설물 설치 (자전거도로, 조명등 등)

도 급 자 : 대흥토건㈜

공사기간 : 2015. 1. 6. ~ 2015. 9. 5

도 급 비 : 3,332백만원

관련근거

관련근거 : 선진경춘감-15-16

“경춘철교 정비공사 준공기한 연장 요청”

준공기간 연기사유

준공기한 연장일수 검토

- 수방기간 공사중지 : 2015.5.15.~2015.10.15.(154일)

- 하천점용허가를 위한 공사중지 기간

․ 2015. 3. 9 ~ 2015. 9. 5(181일)

- 공사중지 기간과 수방기간 중복일수 공제

․ 2015. 5. 15 ~ 2015. 9. 5(114일)

준공기한 연장일수 : 154일 + 181일 – 114일 = 221일

구 분	당 초	변 경	비 고
준공 기한	2015. 1. 6 ~ 2015. 9. 5	2015. 1. 6 ~ 2016. 5. 23	221일

연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금 부과여부 : 미부과

조치계획

경춘철교 정비공사 책임건설사업관리기술자가 제출한 준공기한 연기원검토보고건에 대하여 내용검토 한 바 타당하기에 준공기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자함

붙임 : 1. 감리단 공문서 및 예정공정표 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.