투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	곰사 환경개선공사 공사기간 연기 알림

노후된 곰방사장 및 관람환경을 개선하고자 『곰사 환경개선공사』 시행중 안전시설 추가공사 등을 위하여 부득이 공사기간을 연기함을 알려드리오니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 곰사 환경개선공사

나. 위    치 : 곰사 일대

다. 공사내용 : 방사장 전면 정비(바닥, 수영장, 벽천, 모트 등),

관람대 및 녹지대, 우·오수관 정비 등

라. 공사기간

- 당초 : 2015. 2. 23 ~ 8. 21

- 변경 : 2015. 2. 23 ~ 9. 30

마. 협조요청

- 공사기간 변경 안내(홈페이지 및 매표소) : 총무과, 운영과

- 기계 및 전기분야 감독 : 시설과

- 곰사 일대 CCTV 설치 검토 : 안전추진반

- 행동풍부화 시설 감독 및 전시 용역 추진 : 동물기획과

- 공사기간 중 동물 내실 관리 : 동물복지과.  끝.

	조경과장
수신자	서대공1-8
주무관	호명옥		주무관	이옥하		조경과장	08/18 강인호
협조자
시행	조경과-4310	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7551	/전송	02-500-7993	/		/	대시민공개