문서번호	방재시설부-10998
결재일자	2015.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	08/18 임춘근
협조

-공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 폐기물처리용역-

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

<공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 폐기물처리용역>

설계변경(총차1회, 1차1회)검토보고

서울시 시설관리공단에서 제출한 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 폐기물처리용역 설계변경(총차1회, 1차1회)에 대한 적정성 검토보고사항임

용역개요

◦ 용 역 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사 폐기물처리용역

◦ 용역개요 : 폐콘크리트 2,562톤, 폐아스콘 809톤

◦ 용역기간 : 2013. 4. 29 ~ 2015. 12. 31(1차:2013.4.29.~2015.12.31.)

◦ 도 급 액 : 99,459천원(1차 50,000천원))

◦ 용 역 사 : ㈜하경엘씨 대표 곽봉기

◦ 위탁감독 : 서울시시설관리공단 공사감독2처

설계변경현황

1) 총차 및 1차

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총 차 용 역 비	99,459,000	95,414,000	감) 4,045,000
금차(1차) 용역비	50,000,000	50,000,200	-

2) 설계변경사유

- 공릉2빗물펌프장 및 면목4동 배수관로 물량변경에 따른 폐기물 총차물량 증, 감

- 총차물량 변경에 따른 1차물량 수량변경(공사비 증.감없음)

구분	단위	당초	변경	증. 감
폐콘크리트	톤	2,562	1,838	감)724
폐아스콘	톤	809	1,392	증)583

3) 주요공종 변경내용

구분	공종	규격	단위	수량		증. 감
				당초	변경
공릉2동	폐기물운반(콘크리트)	L=28.4㎞	톤	1,264	1,383	증)119
	폐기물운반(아스콘)	L=28.4㎞	톤	563	726	증)163
면목4동	폐기물운반(콘크리트)	L=31.8㎞	톤	1,298	455	감)843
	폐기물운반(아스콘)	L=31.8㎞	톤	246	666	증)420

조치의견

◦ 위탁감독의 설계변경도서를 검토한 바. 관련규정에 적정하므로 위탁감독의 의견대로 설계변경(총차1회, 1차 1회)하여 용역추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 위탁감독 검토의견서 1부

2. 총차 1회, 1차 1회 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.