투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(경춘철교 정비공사)

1. 우리본부에서 시행중인 「경춘철교 정비공사」의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 경춘철교 정비공사

나. 도 급 비 : 3,332백만원

다. 도 급 자 : 대흥토건(주) 대표 한명선

라. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2015.1.6.~2015.9.5	2015.1.6.~2016.5.23

○ 연기에 따른 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금부과여부 : 미부과

마. 연기사유 : 준공기한 검토보고서 참조

바. 예산과목 : 생활권 공원확충, 도심공원확충, 경춘선폐선부지 공원조성

시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 준공기한 연기검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 및 예정공정표 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	08/19 임춘근
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-11084	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌등 14층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개