투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경소위원회(8차) 지적사항 조치결과 보고(월드컵대교)

1. 토목부-17059(2015. 8.17.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 「월드컵대교 건설공사」의 제8차 설계변경 자문회의(소회의) 지적사항에 대하여 붙임과 같이 조치결과를 보고합니다.

(단위 : 천원)

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	북단IC 교통소통대책 변경으로 인한 Ramp-F 신설	①정책, 계획 등 사업계획 변경	167,177	증 272	167,449
2	북단IC Ramp-F 신설로 인한 보강토옹벽 반영	①정책, 계획 등 사업계획 변경	70,350	-	70,350
3	포장공 관급자재 【아스콘포장 중간층】설계누락분 반영	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	315,518	-	315,518
4	양화대교 P13 수상구간 조사 및 하상잔재물 처리비 반영	기타	60,362	감 550	59,812
5	북단IC 횡단배수관 변경설계 반영	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	168,382	-	168,382
6	북단IC L형옹벽 및 보강토옹벽 뒷채움 잡석 설계누락분 반영	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	65,779	감 3,000	62,779
7	북단IC D구간 지하지장물 (강관 D1500)구간 대안공법 및 가시설 반영	⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등	61,372	-	61,372
8	북단 매립폐기물 처리방법 변경	④ 현장여건 상이 ⑦ 공법변경	감 982,400	-	감 982,400
계			감 73,460	감 3,278	감 76,738

붙임 : 설계변경 자문회의 지적사항 조치결과 1부.  끝.

주무관	장기철		토목총괄과장	서관석		토목부장	08/19 노우성
협조자
시행	토목부-17239	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2546	/전송	02)3708-2599	/	jjang2235@seoul.go.kr	/	대시민공개