함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고 회신 (방배동 446~489번지외 2개소 배급수관)

1. 공사감독2처-10786(2015. 07. 22)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에서 제출한 방배동 446~489번지외 2개소 배급수관 정비공사(1~2구간)의 실정보고서를 검토하고 아래와 같이 회신하오니 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 조치의견

공단 실정보고 내용	조치 의견	비 고
1~2구간 기존관 폐쇄에 따른 인입관 및 소화전 연결	GIS상 표기 오류에 따라 발생한 사항임에 따라 설계서상 없는 내용으로 추후 정산 및 설계 변경 타당

끝.

	강남수도사업소장
주무관	안규태		시설관리과장	08/19 송근호
협조자
시행	시설관리과-17803	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4909	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(5)