문서번호	기전과-8628
결재일자	2015.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
엄인영	윤석주	08/19 김호성

2015년 교통안전표지 설치 및 개선공사

(작업지시 변경계획)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

서부도로사업소

(기전과)

2015년 교통안전표지 설치 및 개선공사

(작업지시 변경계획)

2015년 교통안전표지 설치 및 개선공사 감독 중 아래와 같이 설계 변경 사항이 발생되어 보고함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전표지 설치 및 개선공사

○ 공사기간 : 2015. 3.12 ~ 2015. 12. 31

○ 시 공 사 **************

○ 공 사 비 : 80,738,780원 (도급비 : 80,738,780원)

□ 관련문서

○ 기전과 - 7270(2015.6.8)호

○ 영호 본 2015-115(2015.8.13)호

□ 보고내용 및 대책

보고 내용(감리)	대 책(사업소)
1-2차 시공 완료 후 3차 작업지시서 검토한 결과 공사 계약금 초과(2,000천원) 발생 됨.	경정비 순찰에 의한 보수건(28건)은 작업 지시에서 제외

□ 보고자 의견

○ 3차 작업지시로 인한 공사 내용은 예산 초과가 발생하여 경정비 순찰 보수(28건)건은 작업지시에서 제외하여 예산범위 내에서 집행하고자 함.

따로붙임 : 1. 관련 문서 1식.

2. 재작업지시서 1부.   끝.