문서번호	시설보수과-4534
결재일자	2015.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
김종범		박용선		08/19 임대성
협 조
	도로보수과장				代송광석
	주무관				代이귀섭
	주무관				나철흠
	주무관				정병윤
	주무관				조장호

회 의 결 과 보 고

(택지개발지구내 도로시설물 인수.인계 관련)

2015. 8. 19

동부도로사업소

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

회 의 결 과 보 고

(택지개발지구내 도로시설물 인수.인계 관련)

1		회 의 개 요

○ 일    시 : 2015. 08. 18.(화) 14:00~16:00

○ 장    소 : 동부도로사업소 2층 회의실

○ 참석대상 : 19명

- 시공관계자 12명 : 발주처 5명, 시공사 5명, 감리 2명

- 유지관리기관 7명 : 사업소장, 시설보수과장, 시설물담당 5명

○ 회의안건 : 도로 등 시설물 인수.인계 관련 재반 사항

2		인 수 대 상

○ 도로시설물

시설명	위 치	개 요	시공사	준공예정일	담당	공정 (%)	비고
탄천우안도로 지하차도	송파구 문정동	B=8.5~11.5m L=370m(상행) L=470m(하행)	㈜엠지엘 대보건설(주)	2015.10.13	김종범	90	SH
위례1지하차도	송파구 장지동 ~하남시 학암동	B=16.8m L=628m	금호산업(주)	2015.12.30	나철흠	80	LH
장지지하차도	송파구 장지동 ~성남시 창곡동	B=18~24m L=1,275m	진흥기업(주) 홍익산업개발(주)	2016.03.30	조장호	80	SH
세곡 1교	세곡동 275-5	B=54.4m L=49m	진흥기업	2012.04.30	정병윤	100	SH

○ 기전 및 기타 관리동 시설물

시설명	비 상 발전기	배수 펌프	CC TV	조명 시설	FAN	전광판	진 입 차단막	집수정	관리동
탄천우안도로 지하차도	1대	3대	-	100개	-	-	-	1개소	1개동
위례1지하차도	-	-	4대	468개	-	-	-	-	-
장지지하차도	1대	12대	22대	932개	14대	2개소	2개소	3개소	1개동
세곡 1교	-	-	-	-	-	-	-

3		발주처(SH,LH공사)에 요청한 사항(사업소장, 시설보수과장)

○ 외부전문가 합동 현장점검 전 시설물별 현황판 송부 요청

○ 외부전문가 합동 현장점검 시 현장 안내 등 협조 요청

- 시공중인 시설물 점검을 통해 유지관리상 보완이 요구되는 사항을 사전에 조치하여 인수.인계가 원활히 이루어 질수 있도록 조치

○ 시설물 인수.인계 전 “시설물 인수.인계 목록” 자료 사전 준비 요청(따로붙임)

- 시설물 인수.인계전 사전에 인수.인계 자료를 준비하여 인수.인계가  원활히 이루어 질수 있도록 조치

○ “시설물 인수.인계 관련 협의사항”에 대한 조속한 조치 요청

- 탄천우안도로지하차도

∙ 기존 협의사항에 대하여 반영 조치완료 하였으나, 아직 반영되지 않은 충격흡수시설은 도로안전시설 설치 및 관리 지침에 의거 등급제품으로 조속히 설치토록 요청(따로붙임)

- 장지지하차도

∙ 기존 협의 사항인 “지하차도 U-Type 구간의 동절기 교통사고 예방과 소음절감을 위한 시설설치 요청” 사항에 대하여 조속히 검토토록 요청(따로붙임)

∙ 지하철 8호선 하부 통과구간 구조물의 안정성 검토 요청

▸ 지하철 진동이 구조물 안정성에 미치는 영향 검토

- 세곡1교

∙ 기존 협의사항에 대하여 반영 조치완료 하였으나, 아직 반영되지 않은 벽체판넬(교량옆면)로 인한 시설물 점검불가 사항에 대하여 전문가 자문을 받아 방안강구 후 인계(따로붙임)

4		향 후 계 획

○ 외부전문가 합동 현장점검 시행

- 점 검 일 : 2015.8.24(월)~9.4(금)

- 점 검 자 : 시설물 별 12명(외부전문가 4명, 시공관계자 3명, 과장 및 담당 5명)

※ 외부 전문가

토목 구조물 분야		전기전력설비 분야	건축 기계설비 분야	비고
토질 및 기초	토목구조
에스코컨설탄트 황재돈 사장	한양대학교 박대효 교수	은세기술(주) 박병수 대표	㈜설화엔지니어링 조율연 부사장

- 점검방법 : 외부전문가 및 시공관계자와 합동점검

- 주요 점검 내용

∙ 콘크리트 구조체, 노면포장, 배수시설(집수정 포함)

∙ 환기설비, 방재설비, 영상감시설비, 원격제어설비, 지하차도 내부 조도

∙ 기타 유지관리 상 보완이 요구되는 사항 등

○  2차 시공관계자 합동 회의 개최

- 원활한 시설물 인수.인계를 위해 10월 19일(예정) 2차 시공관계자 합동회의를 개최하고자 하며, 도로보수과 담당 직원은 인수 할 시도(공고 예정 포함)를 점검 후 회의 참석

-  필요시 본청 유관부서(도로계획과,도로시설과) 담당자도 통보하여 참석하게 하고자함

따로붙임 : 1. 시설물 인수.인계 목록 1부

2. 시설물 인수.인계 관련 협의사항 1부.

3. 회의 참석자 명단 1부.

4. 시설물 위치도 및 회의사진 1부.  끝.

시설물 인수.인계 목록

연번	인수인계 서류	수량	비 고
1	시설물 인수인계대상 현황	1	인수인계서에 첨부 (총계, 서울시, 하남시, 성남시 분류)
※ 공사준공 서류(CD 5매 별도)
2	준공도면(도로 및 도로시설물 일체)	2
3	실시설계보고서(종합보고서)	2
4	토질조사보고서	2
5	공사시방서(특별시방서 포함)	2
6	준공내역서	2
7	품질관리계획서	2
8	준공사진첩	2
9	소방감리결과 보고서	2
10	유지관리지침서	2
11	초기점검보고서	2
12	구조 및 수리계산서(전기분야 계산서 포함)	2
13	수량산출서	2
14	유지관리매뉴얼(계측관리,재난대응 매뉴얼 포함)	2
※ 제영향평가 서류(CD 2매 별도)
15	광역교통개선대책 보고서	2
16	사전환경성 검토서	2
17	사전재해영향성 검토서	2
※ 유지관리 서류
18	시설물 관리대장	2
19	공종별 하자담보책임기간조서 (하자보증보험증권 원본 포함)	2
20	공사참여자 현황	2
21	공사완료공고	2
※ 기 타
22	외장하드(1~21번)	2

시설물 인수.인계 관련 협의사항

(탄천우안도로지하차도)

연번	구 간	요구 사항	조치 결과	비고
1	지하차도 상.하행선 (내부마감재)	-타일부착시 탈락이나 본 구조체 균열 등 확인이 어려우므로 중성화방지 및 염해방지와 아울러 표면침투성 도장재 검토요청	반영(중성화 및 염해방지 나노세라믹 도장 적용 )
2	지하차도 상.하행선 (포장)	-아스콘포장은 향후 부분적 보수시 방수효과를 기대하기가 곤란하므로 별도 방수가 불필요하며, 내구성이 우수한 포장재 검토요청	반영(RPC 콘크리트포장 적용)
3	지하차도 상.하행선 (방호울타리)	도로안전시설 설치 및 관리 지침에 의거 등급제품을 사용하고, 내식성 재료를 선정요청 높이는 110~120cm적용	반영(높이 120cm 적용)
4	지하차도 상.하행선 (충격흡수시설)	-도로안전시설 설치 및 관리지침에 의거 등급제품 사용요청	반영 예정
5	지하차도 상.하행선 (신축이음)	-포장자재 변경에 따른 제품 선정요청	반영(USG조인트 적용)
6	지하차도 상.하행선 (도로봉합제)	-포장자재 변경에 따른 제품 선정요청	반영(로드세이브실란트봉합제 적용)
7	신축이음	-신축이음 파손	보수 완료
8	벽체부	벽체 누수	보수 완료

시설물 인수.인계 관련 협의사항

(장지지하차도)

연번	구 간	요구 사항	조치 결과	비고
1	U-Tape구간	-지하차도 U-Tape구간의 동절기 교통사고 예방과 소음절감을 위한 방음터널 및 케노피 설치 검토요청	검토 중
2	U-Tape구간	-종단 급경사 구간에 대한 안전사고 예방 대책의 일환으로 미끄럼방지 시설 검토요청	검토 중
3	박스 및 터널구간	-당초 시설물 벽체에 계획된 도장공법을 유지관리측면을 고려하여 타일설치로 검토요청	검토 중
4	터널구간	-2-Aech 터널 중앙기둥 상단저부는 지하수가 체수되는 곳으로 공용중 누수 취약부가 될 것이므로 유도배수처리 방안 검토요청	검토 중
5	U-Tape구간	-방음터널 등 기타 부대시설 세부검토 사항 반영요청 ·장지지하차도 검토의견 통보(시설보수과-4783호, ‘14.12.11)	검토 중

시설물 인수.인계 관련 협의사항

(세곡1교)

연번	구 간	요구 사항	조치 결과	비고
1	포장부	-빗물받이 개폐 가능한 것으로 교체요청	조치 완료
2	포장부	-자전거도로 경계석 빗물받이 유입구 확대요청	조치 완료
3	포장부	배수유도관 구배불량 및 유지관리 불가(청소 개폐구 설치요청)	조치 완료
4	벽체	-벽체 판넬 휨 및 탈락 (보수요청)	조치 완료
5	벽체	벽체판넬(교량옆면)로 인한 시설물 점검 불가(방안 강구 요청)	검토 중 (구조기술사 자문)
6	교량하면	-교량하면 교대 등 일부 누수 등 발생(조치요청)	조치 완료
7	포장부	-포장 신축이음장치 막힘(조치요청)	조치 완료

택지개발지구 시설물 인수·인계 대상 위치도

탄천우안도로지하차도

장지지하차도

위례1지하차도

회 의 현 황 사 진