문서번호	치수과-998
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
최혜경		김용제	03/13 차광재
협조
	주무관		박정태

보   고   서

〔2013년 한강공원 접근시설 유지보수공사〕

2014. 3

시설부

치수과

보      고      서

- 2013년 한강공원 접근시설 유지보수공사(년간단가) -

2013년 한강공원 접근시설 유지보수공사(년간단가)에 대하여 아래와 같이 최종 설계변경을 실시하고 준공처리하고자 함.

Ⅰ				공사개요

❍ 공 사 명 : 2013년 한강공원 접근시설 유지보수공사(년간단가)

❍ 공사기간 : '13. 2. 28 ~ '14. 3. 31

❍ 시 공 사 : 인명건설(주)   대표  조성보

❍ 계약금액 : 1,256,268,600원

❍ 접근시설 : 한강제방 74.7㎞, 나들목 55개소, 수중보 2개소

Ⅱ				보고내용

❍ 설계변경사유

- 신규공정 발생 : 당산 차량높이제한봉 및 트렌치 보수 등

- 기타물량 증감 반영

❍ 설계변경내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
1. 보수공	446,256,303	453,472,626	증 7,216,323
2. 토공	44,143,824	42,320,903	감 1,822,921
3. 포장공	229,881,253	221,701,723	감 8,179,530
4. 부대공	151,939,880	159,087,901	증 7,148,021
제 잡 비	268,039,604	259,499,311	감 8,540,293
폐기물처리비	1,801,500	5,979,900	증 4,178,400
부 가 세	114,206,236	114,206,236	-
총공사비	1,256,268,600	1,256,268,600	-

❍ 주요보수사항

- 이촌나들목 : 방음벽 설치

시공 전	시공 후

- 개화나들목 : 도로 재포장

시공 전	시공 후

- 압구정나들목 : 바닥 및 천정 보수

시공 전	시공 후

Ⅲ				향후일정

❍ 2014. 3. 14 : 설계변경계약

❍ 2014. 3. 31 : 공사준공

첨부 : 설계변경(3차)내역서 1부.