문서번호	진료부-8228
결재일자	2015.8.19.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
★주무관	영상의학팀장	영상의학과장	진료부장		서북병원장
조진용	주무학	윤영애	서해숙		08/19 나백주
협 조
	원무과장			代임재규

디지털 진단용 엑스선장치 구매 계획

2015. 08.

서울특별시 서북병원

(진료부/영상의학과)

디지털 진단용 엑스선장치 구매 계획

최신 의료 환경변화에 능동적으로 대응 하고자 아나로그방식에서 디지털방식으로 전환 및 진단용 엑스선 장치의 디지털에 대한 다양한 요구를 충족시킬수 있도록 노후된 장비를 교체하여 첨단 의료서비스를 제공함으로써 환자 진료 효율의 극대화를 추구하고자 함.

현 황

Ⅰ

장비현황

장비명	형식명 (모델명)	제조국 (제조사)	구입연도	내구연한	비고
진단용방사선발생장치 (본관 일반촬영실)	R-630-150 (UD150L-30E)	일본 (SHIMADZU)	2005.7	10년

현재 사용하고 있는 장비는 내구연한(10년) 경과된 장비로, 결핵환자를 제외한 모           든 외래, 병동환자를 검사하는 장비임.

아날로그 환경에서 디지털화 하여 사용중인바, 장비가 노후 되어 방사선 피폭           선량이 디지털 장비에 비해 4배 정도 높게 조사되고 있음.

또한, 체격이 큰 환자인 경우 영상이 일부 표현되지 않는 등 영상검사 진단에           차질이 있으므로 디지털방사선 장치로 교체가 요구됨.

Ⅱ

세부추진계획

장비내역

구매장비 : 디지털 진단용 엑스선 장치(DR)

설치장소 : 본관 영상의학과 일반 촬영실

소요예산 : 480,000천원

추진일정

1) 장비업체 제안 설명회 개최

일  시 : 2015. 8월 중 (자세한 일정은 추후 협의)

장  소 : 3층 중회의실

발표자 : DR 장비업체 3개사 내외

2) 의료장비심의위원회 개최

일  시 : 2015. 8월 중 (자세한 일정은 추후 협의)

장  소 : 3층 중회의실

심의사항

ㆍ 디지털방사선발생장치 구매 필요성 검토

ㆍ 구매대상장비 사양의 적정성 검토

ㆍ 수입(특정) 제품 선정 심의

심의위원회 구성 (위원장 포함 6명)

ㆍ 위원장(1명) : 병원장

ㆍ 당연직 위원(4명) : 진료부장, 간호부장, 약제부장, 원무과장

ㆍ 위촉직 위원(1명) : 영상의학과장

ㆍ 간사 및 서기(2명) : 영상의학과 팀장, 영상의학과 서무

3) 의료장비 통합구매 의뢰

구매서류 제출 : 2015. 8. 28 (서울의료원 계약심사팀)

제출서류

ㆍ 의료장비 통합구매요구서

ㆍ 비교규격서

ㆍ 공고규격서(영문 및 국문)

ㆍ 1차 산출기초조사서

ㆍ 견적서 및 카달로그

ㆍ 의료장비 품목선정(규격)ㆍ예산 심의서

ㆍ 수입ㆍ특정제품선정심의서

4) 통합구매 업무절차

발주기관	구매요구→	서울의료원	서울시	서울의료원	결과통보→	발주기관
예산심의.규격검토 시장조사.규격심의		자료취합→규격검토→사전규격공고(G2B)→ 2차시장조사	계약심사	입찰(G2B)낙찰자결정		계약체결

5) 장비 구매 계약 체결

구매방법 : 입찰에 의한 계약 체결 (서울의료원 계약심사팀)

소요예산 : 480,000천원

세부 추진일정

일 정	내 용	비 고
8. 12 ~ 8. 13	구매계획서 작성
8. 13 ~ 8. 19	시장조사 및 벤치마킹
8. 20 ~	장비 설명회 및 장비구매 심의위원회 개최
8. 25 ~ 8. 27	장비 규격서 등 서류제출 및 구매 의뢰	서울의료원 (의료장비 통합구매 서류제출) (계약심사팀-1219, 2015.8.10.)
9. 01 ~ 9. 18	의료장비 통합구매 규격 등 심의	서울의료원 (규격공고 및 규격심의) :2~3주 소요
9. 21 ~ 11.23	계약심사 및 입찰(G2B) 낙찰자 결정	서울시 (계약심사) 서울의료원 (입찰 및 낙찰자결정) :2~3개월 소요
2016. 1. 18 ~ 1. 22	장비 설치 및 시험 가동 (장비 설치기간중 일반 영상의학 검사는 특수촬영실 및 서관 촬영실에서 대체 검사)	장비설치는 발주후 2~3개월 소요
1. 25	본관 일반촬영실 검사 시행

※ 상황에 따라 일정 변경 될 수 있음

Ⅲ

행 정 사 항

원무과 장비구매, 설치 및 전산관련 협조

PACS 업체와 장비 연동을 위한 협조

기존장비는 불용품의 소요조회 후 불용결정 또는 매각 검토

(서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제71조, 제72조)

- 디지털 디텍터(Detector) 제외

Ⅳ

기 대 효 과

신속 ㆍ정확한 의료영상 서비스 개선으로 시민 고객만족도 향상

최신 디지털 의료 환경 도입으로 병원 이미지 제고