문서번호	시설관리과-17848
결재일자	2015.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
안규태	08/20 송근호

배급수관 정비공사 실정보고 관련 조치계획 (방배동 446~489번지외 2개소 배급수관 정비공사)

2015.  8.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

배급수관 정비공사 실정보고 관련 조치계획

우리 사업소에서 시행하고 있는 방배동 446~489번지 외  2개소 배급수관 정비공사와 관련하여 감독기관인 시설관리공단으로부터 실정보고서가 접수되어 검토한 내용을 다음과 같이 보고합니다.

※관련근거 : 공사감독2처-12564(2015.08.19.)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 방배동 446~489번지 외 2개소 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 2015. 05. 18 ~ 09. 14

○ 도급액 : 371,317,000원

○ 공사개요 : D=30~300mm , L=1,425m

○ 계 약 자 : *************

○ 감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처 이병진

□ 시설공단 실정보고 내용 및 사업소 검토

`

연번	공단 실정보고 내용	사업소 검토 내용	비 고
1	- 3구간 지장물 과도로 인한 부설연장 축소 3구간 공사 구간인 서초동 1679-2(시점부) ~ 서초대로66길 입구간 굴착결과 지장물(통신BOX 2EA, 통신 약 24공 및 전기 6공, 서초~ 양재간 통신구, 하수관등)과다로 당초 설계대로 연결이 불가능하여 D300, L≒43m가 부설 불가능한 실정임	공단실정보고 내용에 의거 3구간 시점부는 지하장애물 밀집으로 더 이상 정비공사가 불가한 실정이므로 타절 준공처리함이 타당함. - 미정비내역 : D=300, L≒43m

□ 조치의견

○ 위 검토내용처럼 3구간 시점부(서초동 1679-2)는 지하장애물 밀집으로 더 이상 정비공사가 불가한 실정이므로 타절 준공처리 코자 함.

- 미정비구간(D=300, L≒43m)은 추후 설계변경 시 반영 정산조치

□ 행정사항

○ 위 사업소 검토내용을 감독기관인 서울시시설관리공단에 통보

따로붙임 : 현장실정 보고서 각 1부.  끝.