문서번호	도로보수과-7948
결재일자	2015.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
김동민		08/20 김권일
협조

제4차 작업지시(추가) 관련 실정보고서(2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가))

2015. 08.

작업지시 관련 실정보고(제4차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2015.03.24 ~ 2015.12.31

○ 시 공 사 : 엘씨씨건설㈜ 대표 심 강 보

○ 도 급 비 : 금376,970,000원

□ 보고내용

○ 제4차 작업지시에 포함되어 있는 사후정비 포장 도색건은 현재 포장공사의 지연으로 인해 공사기간내에 도색작업이 불가능한 실정임

○ 곰달래로 147~목동사거리 구간은 연초에 재포장 계획이 수립되어 있었으나 취소되었으며, 현재 노면상태가 매우 불량하여 긴급하게 재도색 실시 필요

○ 120 등 추가 민원 발생건에 대하여 조속히 재도색 실시

○ 보수대상 및 물량

- 별첨 구간표 참조

□ 조치계획

○ 위 노면표시 신설 및 재도색건에 대하여 교통안전시설(노면표시) 유지보수(연간단가) 업체에 공사기간 연장 및  추가 작업지시하여 시공하고 추후 설계변경시 정산처리하고자 합니다.

- 건    명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

-제4차 작업지시(추가)

- 작업기간 변경

· 당초 : 2015.08.03. ~ 09.02

· 변경 : 2015.08.03. ~ 09.30

- 추가 공종 및 물량

· 노면 재도색 7,590m, 차선 제거 105m

첨  부 : 구간표(추가) 1부. 끝.