보  고  서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이승환	代이승환	08/20 이자화

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여  급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	***********	D=30mm, L=5m	신설-45번
2	****************	D=40mm, L=5m	신설-46번
3	***************	D=40mm, L=6m	신설-47번
4	***********	D=25mm, L=5m	신설-49번
5	***********	D=40mm, L=6m	신설-52번

▢ 보고 내용

○ 상기 신축건물 급수공사 관련 작업지시를 하였으나, 가시설미철거 및 공사현장에 자재적치로 인해 수요가가 급수공사 연기원을 제출하여 불가피하게 급수공사를 연기하여야할 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 신축건물 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-45	’15.08.06 ~ ’15.08.20	’15.08.06 ~ ’15.08.26
신설-46	’15.08.06 ~ ’15.08.20	’15.08.06 ~ ’15.08.31
신설-47	’15.08.06 ~ ’15.08.20	’15.08.06 ~ ’15.08.26
신설-49	’15.08.07 ~ ’15.08.20	’15.08.07 ~ ’15.09.10
신설-52	’15.08.13 ~ ’15.08.21	’15.08.13 ~ ’15.08.26

붙임 : 상수도공사 연기원 1부.(별도첨부)  끝.