함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고 회신 (방배동 446~489번지외 2개소 배급수관)

1. 공사감독2처-12564(2015. 08. 19)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에서 제출한 방배동 446~489번지외 2개소 배급수관 정비공사의 실정보고서를 검토하고 아래와 같이 회신하오니 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

공단 실정보고 내용	사업소 검토 의견	비고
“3구간” 지하장애물 밀집으로 인한 부설연장 축소	3구간 시점부는 지하장애물 밀집으로 더 이상 정비공사가 불가한 실정이므로 타절 준공처리함이 타당함 미정비내역 : D=300, L≒43m

끝.

	강남수도사업소장
주무관	안규태		시설관리과장	08/20 송근호
협조자
시행	시설관리과-17885	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4909	/전송	02-3146-4939	/		/	대시민공개