문서번호	설비부-10214
결재일자	2015.8.20.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	김영수	08/20 박기형

『의주로 지하차도 평면화 전기공사』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『의주로 지하차도 평면화 전기공사』

설계변경 검토 보고

『의주로 지하차도 평면화 전기공사』와 관련 시공사로부터 실정보고에 따른 설계변경 요청이 있어 아래와 같이 보고 드림.

관련근거

○ 설비부-6264(’15.5.28.)호 --- 업무지시(의주로 지하차도내 전기덕트 이설 요청)

○ ㈜중부전기_제JB15-JO818호(’15.8.19) --- 실정보고에 따른 계약변경요청 건

공사개요

○ 공 사 명 : 의주로 지하차도 평면화 전기공사

○ 위    치 : 중구 순화동 207번지

○ 규    모

- BOX구간 70m, U-Type옹벽 180m

- 가로등주(9mx2등용)8본, LED램프(90W) 16개, 기타 부대공 1식

○ 도 급 자 : ㈜중부전기건설

○ 도 급 비 : 34,767,860원

○ 공사기간 : 2015.04.08. ~ 2015.10.31.

주요 설계변경 내용

(단위 :천원)

공 종	변경사유	당 초	변 경	증·감	비고
가로등주 철거	- 4등용 등주 1본 존치	7,186	7,067	감118
기존 터널조명 배관, 배선	- 토목구조물공사 저촉으로 이설	12,282	19,972	증7,690
인입간선 변경	- 기존 가로등분전반 ⇒ 터널분전반	598	424	감174
기타부대공사	전기 배선, 배관 등 물량 증가	998	1,005	증7

공 종	변경사유	당 초	변 경	증·감	비고
소 계		21,065	28,470	증7,404
보험료 정산 (제경비 포함) 계	건강,연금,노인장기	34,768	45,655	증10,887

도급비 변경현황

구 분	변 경 현 황		증·감	비고
	당 초	변 경
도 급 비	34,767,860	45,655,000	증10,887,130

담당자 검토의견

○『의주로 지하차도 평면화 전기공사』실정보고에 따른 설계변경 검토결과 적정한 것으로 판단되어 건설총괄부에 계약변경 의뢰코자 합니다.

붙 임 :  1. 관련공문 1부. 끝.