문서번호	정보공개정책과-16187
결재일자	2015.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기록문화팀장	정보공개정책과장
서성호	문인환	08/21 조영삼

「서울기록문화관 개편 사업」

용역사업 준공기한 연기

2015. 8.

행  정  국

(정보공개정책과)

「서울기록문화관 개편 사업」

용역사업 준공기한 연기

서울기록문화관 개편 사업 관련 연출 보강 및 안전사고 예방 대책 보완이 요구됨에 따라 위 사업의 준공기한을 연기하여 사업 완료에 만전을 기하고자 함

□ 검토개요

○ 일    시 : 2015. 8. 18.(화) 15:00 ~ 15:30

○ 장    소 : 서울기록문화관(서울도서관 3층)

○ 참 석 자 : 7명(정보공개정책과 2명/총무과 2명/작품오늘 3명)

○ 검토내용 : 공사 현장 상황 점검 결과 준공기한 연기 검토

□ 검토내용 요약

○ 중정 공간 대형 유리벽 설치에 따른 안전사고 예방 대책 마련

○ 도서관 방문객의 불편(소음, 분진)을 최소화하도록 공사 일정 조정

○ 기존 소방방재 시설 운영에 문제가 없도록 개편 공사 추진

□ 조치사항

○ 수행업체 협의 하에 사업 준공기한 연기(3주)하여 검토결과 지적사항 등 미비점 보완 조치.  끝.