문서번호	설비부-10313
결재일자	2015.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		이달영	08/21 박기형
협조

「구리암사대교 건설 전기공사」

설계변경(총차8회, 4차4회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『구리암사대교 건설 전기공사』

설계변경(총차8회, 4차4회) 검토보고

책임감리단으로부터『구리암사대교 건설 전기공사』설계변경(총차8회,  4차4회) 보고가 있어 검토한 내용임.

Ⅰ		공 사 현 황

○ 공 사 명: 구리암사대교 건설 전기공사

○ 공사내용: 가로등 설치 604본, 경관조명 설치 1식

○ 도 급 비: 3,981,133,000원

○ 공사기간: 2010. 7. 28. ~ 2015. 12. 31.

○ 시공사/감리사: 모범전설(주)/도화엔지니어링 외 1

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2015. 06. 29 : 설계변경 소위원회 자문 개최

○ 2015. 08. 05 : 설계변경 소위원회 자문결과 보고(감리)

○ 2015. 08. 21 : 설계변경(총차8회, 4차4회)보고(감리)

Ⅲ		검 토 내 용

○ 설계변경

- 설계변경 소위원회 자문결과 조치

(단위 : 천원)

심의 요청 금액	심의결과 조정금액	증·감
4,053,440	4,038,310	감)15,130

- 공사비 변경(도급액)

(단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	증·감
총차(8회)	3,981,133,000	4,038,310,000	증)57,177,000
4차(4회)	760,640,000	817,817,000	증)57,177,000

* 공사기간 변경 없음

- 4차분 변경내용

(단위 : 천원)

연번	변경내용	변경금액
1	암사방면 가로등 공사 정산 및 올림픽대로 기존 가로등선로 정비	11,693
2	아천방면 가로등 공사 정산 및 한강시민공원 진입로 가로등 공사	36,883
3	경관조명공사 정산	-9,055
4	기타 간접비 정산	14,900
5	물가변동(1회) 정산	-1,273
6	물가변동(2회) 정산	-7,431
7	물가변동(3회) 정산	-5,356
8	한전지장 전선로 이설 및 절연보호관 설치	16,816
합 계		57,177

Ⅳ		조치계획

○ 설계변경을 위한 소위원회 자문결과를 반영하였으며 공사 중인 4차공사의 설계변경(총차8회, 4차4회)에 대한 감리단 검토의견이 적정한 것으로 판단돼 위와 같이 설계변경하고,

○ 계약부서(재무국 재무과)에 계약금액이 조정될 수 있도록 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 : 1) 감리단 공문 1부.

2) 설계변경(총차8회, 4차4회) 내역서 각 1부. 끝.